투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(양평1유수지 CSOs 저류조 설치 전기공사)

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치 전기공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 전기공사

2. 공사위치 : 영등포구 국회대로 22길 20(양평1유수지 내)

3. 계약업체 : ***************, *************

4. 계약금액 및 기간

차 수	계약금액(원)	계 약 기 간	비 고
총 차	***********	2018. 5.15. ~ 2019. 9.30.
제 2 차	***********	2019. 6. 4. ~ 2019. 9.30.

5. 준공기한 변경 내역

가. 변경사유 : 선행공정(토목공사) 준공기한 연기에 따른 해당 공정(전기공사) 연기

나. 준공기한 변경

차 수	계 약 기 간		비 고
	당 초	변 경
총 차	2018. 5.15. ~ 2019. 9.30.	2018. 5.15. ~ 2019.11.15.
제 2 차	2019. 6. 4. ~ 2019. 9.30.	2019. 6. 4. ~ 2019.11.15.

다. 계약금액 변경 없음

라. 귀책기관 : 서울특별시 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

마. 예산과목 : 물순환정책과, 깨끗한 물 관리, 물 환경개선 및 관리, 양평1유수지 CSOs 저류조 설치, 시설비

붙   임 : 1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기 보고서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	전상은		건축설비과장	김은덕		설비부장	09/19 代여인웅
협조자
시행	설비부-14413	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	jun5209@seoul.go.kr	/	부분공개(7)