“실패 없는 도전, 일등 없는 성취”
문서번호	공간기획3팀-2045		★주임		매니저			팀장(직무대리)			공간기획본부장						대표이사
보존기간	30년
																	09/25
결재일자	2019.09.25.
공개여부	공개
			협 조
방침번호	대표이사 방침 제(354)호
			팀장

	2019년 삼각산시민청 공간 활성화 개선공사 추진계획(안)
			2019

2019년 삼각산시민청 공간 활성화 개선공사 추진계획(안)

동북권 대표 시민소통공간 삼각산시민청 수탁 1년을 맞아 그간의 운영 현황을 반영하여 시민 이용 목적에 적합한 효율적인 시설 환경을 조성하고자 함.

1		추진근거

시민소통담당관-11742(2019.7.22.)호『삼각산시민청 운영 활성화 추진계획 통보』

공간기획3팀 제205(2019.2.13.)호『2019년 삼각산시민청 시설안전 및 자산관리 추진계획』

2		사업개요

사 업 명: 2019년 삼각산시민청 공간 활성화 개선공사

사업위치: 삼각산시민청 1,2동(우이신설선 솔밭공원역사 내)

1동: 도봉구 삼양로 592(2층) / 2동: 강북구 삼양로 595(2,3층)

사업기간: 2019.9~11월

사업내용: 시민 이용 목적에 적합한 효율적인 시설 환경 조성

구 분	워크숍룸 개선	모임공간 조성	편의공간 개편	홍보시스템 추가
내 용	·다수 이용가능 공간 ·독립 공간 조성 ·휴게공간 개선	·시민 거버넌스 모임공간 조성 ·전시공간 개선	·시민 휴게공간 조성 ·공연 편의시설 강화 ·안내데스크 개편	·키오스크 설치 ·전자액자(DID) 설치 ·멀티비전(TV) 설치
장 소	워크숍룸, 쉼터	시민청갤러리	활짝라운지 일대	입구 및 내부통로

사업목표

- 이용 목적에 적합한 환경 제공과 지역 대표 시민소통공간 인지도 확대

- 시민 편의시설 확충 및 구조적 문제 개선을 통한 시민 만족도 제고

소요예산: 159,910천원

시설공사: 110,108천원 / 자산구입: 49,802천원

3		공간 운영현황 및 개선 방향

공간구성

2개동 3개층 공간 운영(1동: 2층/ 2동: 2,3층)

1동 2층	2동 2층	2동 3층
활짝라운지, 북카페 등	워크숍룸1-3, 쉼터	시민청갤러리, 운영사무실

공간별 운영내용

구 분	명칭/면적	내 용
1동 (2층)	활짝라운지(114㎡)	시민이 직접 즐길 수 있도록 조성된 열린공간
	북카페(11㎡)	기증받은 유익한 도서와 휴식을 제공하는 작은 도서 공간
	담벼락미디어	시민이 직접 제작한 영상 미디어 콘텐츠 전시 진행
2동 (2,3층)	워크숍룸1-3(121.8㎡)	시민이 주체가 되는 다양한 토론과 워크숍 운영
	시민청갤러리(51.1㎡)	사진, 소리, 영상 등 다양한 콘텐츠를 활용한 전시 운영
	쉼터(7.3㎡)	도서와 함께 잠시 휴식을 취할 수 있는 다목적 휴게 공간

공간 개선방향

`18.4월 개관 이후 운영현황을 반영한 개선방향

주요 문제점	▶	개선 방향
•대관 운영결과 50명 이상 수용공간 필요 - 전체 수요자 29% 이상 워크숍룸1-2 확장해 공간 이용 •방음시설 미설비로 인한 동시대관 불가 - 공간 소음 발생 시 수요자 민원 발생 (동시대관 제한 운영 중) •쉼터 냉·난방 취약으로 공간 이용 제한 - 복도 위치 구조 특성상 실질적 이용 불가 - 수시 개폐 가능 방화 유리문 설치 필요		•통합 운영 통한 60여명 수용가능 공간 개선 - 공간 수요를 반영한 공간 통합 운영 - 일부 공간 통합해 워크숍룸1 규모 확장 •시민 이용 편의를 위한 독립 공간 조성 - 통합공간 사이 쉼터 배치 통한 공간 소음문제 해결(동시 대관가능) ※ 임시 워크숍룸3 공간 개편해 운영 •쉼터 위치 변경 및 다목적 휴게공간 조성 - 냉·난방시설 이용 가능한 쉼터 조성
•활짝라운지, 시민청갤러리 편의시설 미비 - 시민 편의시설(테이블, 의자 등) 부족으로 공간 이용률 저조 발생 - 공연장 구조 문제(평면구조, 중앙기둥)		•시민 휴게공간 및 맞춤형 공간 개선 - 시민 이용공간 개선(휴게 및 모임 등) (1동: 활짝라운지, 2동: 시민청갤러리) - 수납식 관람석 설치 통한 관람시설 확충

4		공간개선 추진계획

공간개선 추진

1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계
공간개선 방향설정 (서울시)	공간개선 추진계획 작성	기술용역 타당성심사 (서울시)	설계용역 및 공간설계 추진	개선공사 용역입찰	공간조성 공사실시
`19년 7월	9월말	9월말	10월초	10월중순	11월중

1년 운영결과를 반영한 공간개선방향 검토회의 추진에 따른 서울시 추진계획 접수 (`19년 7월 서울시 시민소통과)

경영지원팀 검토 및 협조 하에 공사추진

방문객의 불편을 최소화하기 위한 짧은 기간 소요 인테리어 개선공사

① 2동 워크숍룸 개선공사 추진

개선 추진방향

2동 2층 (현재)		▶	2동 2층 (개선 후)
워크숍룸1(31석)	52.8㎡		워크숍룸1(70석 이상)	75.9㎡
워크숍룸2(16석)	31.4㎡
워크숍룸3(임시 운영)	37.6㎡		워크숍룸2(20석 이상)	37.6㎡
쉼 터	7.3㎡		쉼 터	18㎡

2층에 있는 운영사무실을 3층 워크숍룸3와 변경 (8월중 변경완료)

소규모 3개 공간을 중규모 2개공간으로 확장 개편

- 워크숍룸1,2를 통합확장해 70석 규모의 워크숍룸1로 확장 개편

쉼터 크기 확장 및 편의시설 보강

- 쉼터를 중앙에 배치하고 크기를 키워 대관 진행 시 발생되는 소음을 완화하고, 수요자의 편의에 맞도록 휴게시설 보강

② 3층 시민청갤러리 시민 모임공간으로 추가 조성

이용률이 저조한 시민청갤러리의 용도를 일부 개편하여 전시가 없는 경우 ‘시민모임공간’으로 활용

개선 추진방향

시민청갤러리(현재)	▶	시민청갤러리(개선 후)

수시 시민 거버넌스 모임 공간으로 개편 조성 (인테리어 위주의 공간 개선)

③ 1동 활짝라운지 시민편의 공간 개선

구 분	북카페	활짝라운지	안내데스크
목 적	책과 함께 휴식을 할 수 있는 편의시설 추가	집중도 있는 공연관람을 위한 공간 개편	열악한 근무공간 개선
불편사항 (현재)
	▼	▼	▼
개선방향

창고가 없는 공간의 특수성을 반영한 적재가능한 인테리어 방식 추진

공연 행사 진행시 80명 이상이 집중할 수 있는 관람 방식 개선

안내데스크 개선공사를 통한 근무 환경개선

④ 시민 편의 이용안내 및 홍보를 위한 전자시스템 확충

구 분	키오스크	전자액자(DID)	멀티비전(TV)
규 격	55인치 벽걸이형	43인치 벽걸이형	43인치 천장형
설치장소	1,2동 공간 입구 / 2대	계단 및 내부 통로 / 13대	1동 1,2층 / 2대
내 용

1,2동 키오스크 설치를 통해 서울시정연계 및 행사알림 적극성 활용

이동 통로 내 전자액자 설치를 통해 다양한 행사 안내

유동인구 집중 구역에 멀티비젼 설치해 자체 행사 생중계 시스템 구축

⑤ 기타 공간 활성화를 위한 추가개선

3층 발코니 유휴공간 개선을 통한 전시 시 창고 공간 마련

공간 전체도색을 통한 공간 미화 개선

기존 폐쇄형 방화문을 투명유리 방화문으로 변경해 시민불편사항 개선

조명 변경 및 추가설치를 통한 조도개선

5		향후일정

9월중 서울시 기술용역타당성 심사 추진

10월내 1,2동 내부 개선공사 설계 용역업체 계약 및 설계 추진

예산변경 추진

활짝라운지 편의시설 개편 계획 일부 방향을 기성제품 구매에서 제작변경에 따른 예산변경 진행 (자산취득비 →시설유지관리비)

10월 중 개선공사 용역업체 입찰 진행 (경영지원팀 협조)

11월 말 개선공사 완료 목표

6		소요예산

소요예산: 一金일억오천구백구십일만원정(￦159,910,000)

시설공사(￦110,108,000)/ 자산구입(￦49,802,000)

예산과목

(삼각산시민청)일반관리비>운영경비>시설유지관리비>시설유지관리비

(삼각산시민청)일반관리비>운영경비>자산취득비>자산취득비

예산내역                                                 (단위: 천원)

구 분	세부 공사건명	주요공사 내역	예산액
시설유지관리비: 시설공사(￦110,108,000)
1동 2층 (도봉구)	활짝라운지 개선	◎ 시민휴게공간 조성(공연편의시설 포함)	33,058
		◎ 안내데스크 개편	5,000
2동 2,3층 (강북구)	워크숍룸 개편	◎ 워크숍룸1,2 확장	20,000
		◎ 쉼터 조성	10,000
		◎ 전기통신(프레임 및 배선)	20,350
	시민청갤러리 개선	◎ 시민청갤러리 공간 개선	2,000
	기타	◎ 계단 조명 개선	2,500
		◎ 방화유리문 신규설치	5,000
		◎ 내부통로 도색	2,000
		◎ 발코니 샷시 설치	2,600
공사 설계비		※ 공급가액 설계요율산정(7.47%) 기준	7,600
소 계			110,108
자산취득비: 자산구입(￦49,802,000)
1,2동	전자액자 신규설치	◎ 키오스크 전자액자 조달구매	49,802
소 계			49,802
총 계(시설공사+자산구입)			159,910

관련  1. 2019년 삼각산시민청 시설안전 및 자산관리 추진계획 1부,

2. 삼각산시민청 운영 활성화 추진계획 통보 1부.  끝.