투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	‘마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 지열시스템 구매설치’ 계약변경 의뢰

우리 본부에서 시행 중인‘마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 지열시스템 구매설치’와 관련, 설계변경 (정산)사항이 발생하여 아래와 같이 계약 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계   약   명: 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 지열시스템 구매설치

2. 계   약   자: 주식회사 제이앤지

3. 계약 변경 내용

가. 계약 변경금액

구 분	계약금액(원)			비 고
	당 초	변 경	증․감
총차	663,000,000	656,354,000	감)6,646,500	1차계약분 정산에 따른 변경
1차	448,470,000	441,824,000	감)6,646,000	준공 전 보험료 정산

나. 계약일자: 2017. 7. 16

다. 납품기한(변경없음) : (총차) 2020.7.31., (1차) 2019.9.30

라. 설계(정산)변경 사유 : 1차계약분 준공관련 보험료 정산

4. 예산과목 : 지역발전본부 서남권사업과, 첨단R&D단지조성 및 도시재생, 신성장 경제거점

마곡R&D클러스터 조성, 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립, 시설비

따로 붙임 1. 설계변경(정산) 검토 보고서 1부.

2. 건설사업관리기술자 설계변경(정산) 검토 보고서 1부.

3. 변경내역서(총차, 1차) 1부.

4. 합의각서  1부.  끝.

	설비부장
★주무관	김도형		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	09/30 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-14944	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8605	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)