문서번호	설비부-15060
결재일자	2019.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	녹색성장과장	설비부장		시설국장
정찬교	오삼록	임정규		10/01 김승원
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』

전기공사 및 통신공사 시행계획 보고

2019. 09.

도시기반시설본부

(설 비 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』

전기공사 및 통신공사 시행계획 보고

파주운정3지구 택지개발사업 광역교통 개선대책의 일환으로 추진하는 「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화」전기공사 및 통신공사 발주계획을 보고 드림.

1		공사개요

□  위  치 : 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

□  규  모 : 지하차도 신설 540m(U-type290m, BOX 250m), 도로확장 582m

□  공사내용

□ 전기 : 저압수전설비, 가로등설치 71본, 터널등설치 384개, 신호등설치 2개소, 자동제어설비

□ 통신 : 영상감시설비, 라디오재방송설비, 교통시설물(과속단속, ITS) 이설 공사

□ 공사금액(전기·통신) : ********

□ 전기 : ***********************************

□ 통신 : *********************

□  공사기간 : 착공일 ~ 2021.7.31.(토목공사 준공기한과 동일)

□ 위치도 및 조감도

위치도	조감도

2		추진경위

□ `12.12.26 : 파주운정3지구 광역교통개선대책 확정(LH-720억원 부담)

□ `17.01.31 : 기본설계 완료(도로계획과)

□ `18.05.31 : 실시설계 완료(도기본)

□ `19.08월 : 토목공사 계약 및 착수

□ `19.09.27 : 전기공사, 통신공사 계약심사 완료

3		발주계획

□ 도급공사 발주

○ 계약방법 : 단독 또는 공동도급, 장기계속 계약

○ 낙찰자 결정 : 시설공사 적격심사 세부기준(행안부 예규)에 의함

구분	전기공사	통신공사
발주금액	***********	*********
입찰방법	제한경쟁입찰(실적제한)	제한경쟁입찰(지역제한)
입찰참가 자격	-「전기공사업법」에 의한 전기 공사업면허 보유업체 -시공능력평가액이 추정가격의 1.9배 이상 업체	-「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사업면허 보유업체-입찰참가 신청 마감일 기준 서울특별시에 소재한 업체
공동도급 사항	-지역의무공동도급 대상으로 입찰마감일까지 서울시 소재 업체를 반드시 공동수급업체로 구성하고 최소 지분율은 49%이상. 서울지역 업체가 입찰참가 요건을 모두 충족시 단독입찰 가능 -공동이행 방식의 공동도급이 가능하며 수급업체 수는 대표사 포함 2개사 이내이고, 구성원별 계약참여 최소 지분율은 5% 이상	-공동도급 불가

○ 발주금액 및 입찰참가자격

□ 관급자재 구매                                       (단위:천원)

분야	품 명	금 액	구매방법	비고
전기공사	LED터널조명	*******	***** *****	*
	가로등주	******	*****	*
	LED등기구	******	*****
	무정전전원장치(UPS)	******	*****	*
	비상발전기	******	********	******************************
	저압배전반	*******	********
	자동제어설비	*******	********
전기공사 소계		*******	*
통신공사	영상감시설비(CCTV)	******	*****	*
합계(전기+통신)		*******	*

4		예산집행 계획

□   연차별 집행 계획                                          (단위 : 백만원)

구분	합계	2019년	2020년	2021년
전기·통신 공사	*****	**	***	*****

□ 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 제2자유로 종점부                 (난지도길) 입체화(교통개선분담금), 시설비

5		향후계획

□   2019.10월 : 공사발주(긴급공고) 및 착공

□   2021.07월 : 공사완료