문서번호	공원녹지과-16911			주무관		공원관리팀장		공원녹지과장		도시관리국장
결재일자	2019.10.1.
				김범수		김대수		代김혜란		10/01 한병준
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
		솔밭근린공원 녹지대 휀스정비 계획
2019.10.1.
강 북 구

솔밭근린공원 녹지대 휀스정비 계획

솔밭근린공원 내 녹지대를 보호하고 있는 기존 목재 휀스가 노후화되고 공원과 어울리지 않아 재정비를 통해 쾌적한 공원환경을 제공하고 공원이용객들이 만족할 수 있는 공간을 조성하고자 함

1		추 진 방 향

□ 공원내 녹지대를 보호하고 있는 기존 휀스가 노후화 되어있고 공원환경과        어울리지 않아 철거 후 수목으로 교체

□ 녹지대내 수목 및 초화류가 많이 고사되어 있어 수목 보식으로 주민들에게        쾌적한 공원환경 제공

2		공 원 현 황

□ 위    치: 우이동 80번지 일대(솔밭근린공원)

□ 사업규모: 34,955㎡

□ 주요시설

○ 시설물: 생태연못, 산책로, 데크광장, 화장실, 음수대 등

○ 수  목: 소나무 약800주, 회양목 1,300주, 영산홍 1,000주 등

※ 휀스 현황 : 휀스길이- 1,400m, 휀스 설치년도- 2004년

3		사 업 개 요

□ 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.09.

□ 사 업 비 : 150,000천원(설계비: 10,000천원, 공사비: 140,000천원)

□ 사업내용

○ 녹지대 목재휀스 철거 및 생울타리 수목식재, 녹지대내 수목보식

- 목 재 휀 스 철 거: 40,000원 × 1,400m        = 56,000천원

- 생울타리 수목식재: 6,000원(관목)×9주×1,400m = 75,600천원

- 녹지대내 수목보식: 2,500원(초화류) × 3,360본  = 8,400천원

□ 사업비 확보방법 : 2020년 구비예산 확보하여 추진

4		향 후 계 획

□ 2019.10.        : 2020년 구비예산 확보

□ 2020.01. ~ 02.: 현장조사 및 실시설계용역 시행

□ 2020.03. ~ 09.: 區계약심사 및 공원 환경정비 사업 시행

5		보고자 의견

□ 공원내 노후된 녹지대 보호휀스를 수목으로 교체식재로 공원에 어울리는 환경제공

□ 녹지대내 고사된 수목보식으로 쾌적한 공원환경 제공

붙임  현황 및 사례사진 1부.  끝.