문서번호	급수운영과-12939
결재일자	2014.6.25.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
차승현		代공문수	06/25 김광식
협조
	주무관		공문수

기성검사(감독)조서 보고

「강남구청역~청담공원앞 배수관정비공사」

2014. 06

강남수도사업소

(급수운영과)

기성검사(감독)조서 보고

시행중인 「강남구청역~청담공원앞 배수관 정비공사」와 관련하여, 공사 책임감리기관인 서울시시설관리공단으로부터 기성검사(감독) 조서가 접수되어 아래와 같이 기성부분 준공검사 보고함.

※ 관련문서 : 공사감독2처-9601호(2014.06.24)

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 『강남구청역~청담공원앞 배수관부설공사』

○ 공사개요 : D= 40~400mm, L= 990m

○ 도 급 비 : ************

○ 공사기간 : 2014. 04. 28 ∼ 2014. 08. 29

○ 시 공 사 : *******************

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,

시설비(노후 송배수관 정비)

Ⅱ		책임 감리현황

○ 공사감독기관

- 소  속 : 서울특별시시설관리공단(공사감독2처)

- 감독자 : 위정훈(담당)

Ⅲ		기성검사 준공내역

○ 기성검사 준공일 : 2014. 6. 24

○ 기성 준공검사일 : 2014. 6. 24

○ 기성 준공검사자

- 감독자 : 서울특별시시설관리공단 감독 대리 위정훈

- 검사자 : 서울특별시시설관리공단 대리 김현주, 정민화

○ 기성 공사시행

- 전체 D40~400mm, L=990m/D40~400㎜, L= 770m 완료(공정률 77.8%)

○ 기성금액

단위 : 원

계약금액	금회 기성금액	집행잔액	집행율(기성금)
***********	***********	**********	*****

Ⅳ		조치의견

○ 공사 책임감리기관인 서울특별시시설관리공단에서 제출한 기성검사 (감독)조서 내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하게 준공검사된 것으로 판단되어 붙임 내용대로 처리하고,

○ 계약상대자인 덕성환경(주) 마호성, 장인환에게 기성금이 지급될 수 있도록 행정지원과에 통보코자 합니다.

붙임 : 기성검사(감독) 조서 및 기성내역서 각 1부. 끝