문서번호	토목부-18025
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		장수철	전결 10/07 김용제
협조

보행육교 배수드레인 설치 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

보행육교 배수드레인 설치 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

본 공사 시행중 보행육교 배수드레인이 보행통로에 설치되어 보행자의 통행에 저촉되어 변경 설치코자 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 10.

○ 도 급 비 : 7,145백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황 (위치도)

보행육교 ROOF DRAIN 및 선홈통 설치위치(4개소)

○ 배수드레인 4개소 변경설치

□ 변경내용 검토

○ ROOF DRAIN은 통로 단면내 설치되어 통행로 확보위한 변경

○ 배수관 위치 및 개소가 설계에 미반영 되었고 설계 배수관 수량 누락

○ 배수드레인 변경 검토

(당초 : 통로내부)                   (변경 : 통로외부)

(통로외부설치)

○ 공사비 검토

공 종	규격	단위	수량	단가	금 액 (직접공사비)
ROOF DRAIN 설치	STS304, ㄷ-200*150*180*1.5T	m	120.75	107,131	12,936,067
선홈통 설치	STS304, 127mm*1.2T	m	40.7	83,237	3,412,717
합 계					16,348,784

□ 감리단 검토 내용

❍ 보행육교 배수드레인 변경설치 및 배수홈통 변경 설치는 적정한 것으로 판단됨

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에 따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증) 27백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.