문서번호	물순환정책과-17413
결재일자	2019.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
강신욱	이웅희	정훈모		10/10 이정화
협 조

2020년 빗물마을 조성사업 추진계획

2019. 10.

물순환안전국

물순환정책과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 빗물마을 조성사업 추진계획

마을 단위로 다양한 빗물관리시설을 통합 설치하여 도시화로   악화된 물순환 회복에 기여하고, 노후된 지역의 마을환경 개선을 위해 2020년 빗물마을 조성사업을 추진하고자 함.

1		추진근거

□ 서울특별시 빗물관리 기본계획(2013)

□ 민선7기 시장공약사업('18.06월, 빗물마을 시범사업 확대)

2		그간 추진 실적

□ 2016년 이후 10개 사업 완료(총사업비 5,600백만원-국비500백만원 포함)

○ 2016년

자치구	위 치	면 적(㎡)	사업비(백만원)	비 고
계	3 개소	70,600	1,480
강북구	수유동 516 일대	16,400	800
은평구	불광동 445 일대	17,200	280
성북구	장위동 219-233 일대	37,000	400

○ 2017년

자치구	위 치	면 적(㎡)	사업비(백만원)	비 고
계	4 개소	93,400㎡	2,500
은평구	불광동 445 일대	17,200㎡	1,000 (시비5:국비5)	16년 계속
금천구	시흥동 219 일대	32,200㎡	500
동대문구	제기동 67 일대	24,000㎡	500
양천구	신월1동 240 일대	20,000㎡	500

※ 2017년 국비 매칭사업 1개소(2016년 계속)

• 사 업 명 : 향림 빗물순환마을 조성사업(국비 매칭사업)

• 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 12.

• 위    치 : 불광동 445-10번지 일대 및 향림 도시농원체험원

• 규    모 : A= 17,200㎡

▸공공영역 : 투수포장 10.14a, 침투측구 L=600m, 빗물저류조 2개소(300㎥) 등

▸개인영역 : 빗물저금통 24개소, 빗물정원 8개소 조성

•사 업 비 : 1,000백만원(국비 500백만원, 시비 500백만원)

⇒ 2016년 은평구 불광동 빗물마을 연속하여 추진

○ 2018년

자치구	위 치	면 적(㎡)	사업비(백만원)	비 고
계	3 개소	152,500㎡	1,620
성동구	송정동 66 일대	36,000㎡	405
동대문구	전농동 56 일대	43,500㎡	405
강북구	우이동 180 일대	17,000㎡	405
금천구	독산동 1100 일대	56,000㎡	405	이월,10월 준공 예정

○ 2019년(추진 중)

자치구	위 치	면 적(㎡)	사업비(백만원)	비 고
계	3 개소	152,500㎡	2,250
도봉구	덕릉로60길 일대	98,250㎡	750
은평구	연서로35길 일대	28,000㎡	750
구로구	구로동로40길 일대	114,000㎡	750

3		사업개요 및 추진 방향

□ 사업개요

○ 규    모 : 빗물마을 조성 3개소

○ 사업기간 : 2020.1. ~ 2020.12.

○ 소요예산 : 2,250백만원(마을당 약 750백만 원 지원)

○ 추진내용 : 서울시 - 사업설명회 개최 및 사업 공모, 워크숍 지원

자치구 - 설계(주민워크숍 개최 등) 및 공사 시행

※ '20년도 예산(안) 확정에 따라 사업규모 및 사업비 조정

□ 추진방향

○ 전문가 참여로 지역특성을 감안한 마을 선정

-「빗물마을 조성 적정지역 선정방안(서울기술연구원-’19.12 완료 예정)」을 활용하여「물순환전문가(물순환시민위원회)」로 구성된 선정위원회를 통해 빗물마을 대상지 선정

○ 마을별 디자인 차별화 및 다양한 식생형 빗물관리 시설 설치

- 빗물마을 조성 사업 내용이 투수포장, 침투 측구 등 획일화 된 성향을 벗어나 마을별 차별화된 특색을 가질 수 있도록 빗물관리에 특화된 디자인을 도입

- 빗물 재이용시설은 주로 여름철에만 활용이 가능한 한계가 있는 점을 감안, 서울시 물순환 정책 방향과 부합하고 물순환 회복에 효율적으로 기여하는 식생형 빗물관리시설 설치 지향

- 공원, 주민자치센터 등을 활용하여 빗물정원 등 다양한 빗물관리시설 설치

○ 도시재생 및 마을공동체와 연계한 친환경 빗물마을 조성

- 도시재생사업 등 기반시설 노후지역의 환경개선과 연계한 사업추진

○ 주민 워크숍을 통해 주민이 참여하는 빗물마을 조성

- 워크숍을 통한 주민의견 수렴, 주민 참여를 통해 정책 공감대를 형성하고 자발적 이용·유지관리 도모

4		세부 추진 계획

□ 공모계획 공고

○ 접수기간 : 2019.10.21.~12.6.

○ 응모자격 : 구청장(사업시행 주관부서) 및 주민단체

- 대상지(마을) 주민단체와 구청장이 같이 빗물마을 조성사업 신청

○ 접수방법 : 전자문서 접수

- 소정의 양식에 의거 자치구 사업시행 부서에서 서울시에 전자문서 접수

○ 제출자료 : 공모신청서 1부, 사업제안서(ppt) 1부

□ 자치구 설명회 개최

○ 일    시 : 2019.10.17.(목) 10시

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 8층 회의실

○ 대    상 : 사업공모에 관심 있는 자치구(별도 공문시행)

○ 주요내용 : 사업추진 일정, 공모계획, 사업계획(안) 등 설명

□ 사업대상지 선정

○ 선정위원회 : 공모 접수 완료 이후 '19.12월 중(별도방침 수립)

○ 위원구성 : 물순환시민위원회, LID 전문가 등 3~5명 내외

○ 선정방법 : 평가(배점) 기준에 의거 상대평가를 통해 3개 마을 선정

☞ 사업의 필요성, 실현성, 창의성 등 평가항목에 따라 심사

※ 빗물마을 조성사업 목적과 다른 단순포장 정비 목적의 사업은 제외

□ 주민워크숍 개최

○ 목    적 : 지역주민의 다양한 의견을 수렴하여 빗물마을에 적용

○ 시    기 : 2020.3 ~ 5월 중(기본 및 실시설계 용역 기간 중)

○ 개최주관 : 자치구 사업부서

○ 참석대상 : 주민단체, LID전문가, 서울시(물순환정책과)

자치구(사업부서), 용역사 등

□ 빗물마을 조성공사 추진 - 자치구

기본 및 실시설계

○ 워크숍을 통한 주민의견을 수렴하여 기본 및 실시설계 반영

○ 마을별 특색을 갖는 다양한 디자인 도입

○ 기본 및 실시설계 시 물순환 전문가 참여 자문

○ 각종 물순환 시설 설치 매뉴얼 등의 지침을 반영한 설계

공사 시행

○ 실시설계 용역 준공 전 市 계약심사 등 사전절차 진행

○ 공사 공정 및 시공품질 관리 철저

○ 공사 시행 전 충분한 홍보로 주민불편 최소화

□ 사업 지원 및 사후 관리

지원 사항

○ 주민 워크숍 진행요원(퍼실리에이터) 지원

- (예산과목) 물순환개선 및 관리 물순환시민거버넌스 구축, 사무관리비('20년)

○ 마을별 특색을 살릴 수 있는 디자인 도입을 위한 인력(청년공공디자이너) 지원

사후 관리

○ 사업효과 검증을 위한 모니터링 지속 시행

- 물순환정책과에서 시행 예정인「물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리체계 구축 용역」활용

▸ 강북구 수유동 빗물마을(인수봉) 모니터링 완료

▸ 빗물마을의 물순환회복 효과에 대한 데이터 축적을 위해 대상지역 확대

○ 빗물관리시설 설계·시공·유지관리 매뉴얼 제작 배포(’19.12월 중)

5		향후계획

○ '19.10월 : 사업설명회 개최 및 공모 시행

○ '19.12월 : 대상지 선정 및 통보

○ '20.01월 : 예산 재배정

○ '20.02월 : '20년 빗물마을 기본 및 실시설계 용역 착수

○ '20.03월~05월	: 주민워크숍

○ '20.07월~      : 설계용역 준공 및 공사 시행

붙임 : 1. 공고문(안) 1부.

2. 지원 신청서 1부.

3. 평가 항목 및 배점(안) 1부.  끝.