투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차 및 3차 2회) 계약의뢰(노들섬 특화공간 조성 전기공사)

1. 우리 본부에서 시행중인 「노들섬 특화공간 조성 전기공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성 전기공사(총차 및 3차 2회)

나. 계 약 자 : ㈜코에버정보기술

다. 공사금액 변경 현황

(단위:원)

구 분		당초	변경	비 고(증.감)
도급비	총차	*************	*************	************
	3차	*************	*************	****************** ******************

라. 공사기한(변경없음) : ‘17.11.16.~‘19.10.20(3차:’19.1.28~11.30)

마. 사   유 : 운영부서 요구사항(하부산책로 조명시설 등)과 현장여건(인입선부설 보안등위치 변경 등) 반영 및 물가변동에 따른 계약금액조정에 의한 설계변경.

붙임 1. 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	代곽용길		설비부장	10/17 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-16093	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)