문서번호	급수운영과-21273
결재일자	2019.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이준규		최용진	10/18 유승효
협 조
	주무관			김재영
	주무관			박상권
	주무관			이한수
	주무관			윤승구

설계변경 심의결과 보고

(2019년 도봉구 관내 급수공사)

2019. 10. 17.

북부수도사업소

급수운영과

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행 중인 「2019년 도봉구 관내 급수공사(장기계속단가계약)」의 시공물량 증 · 감 등으로 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고함.

1. 공사 개요

1) 공 사 명 : 2019년 도봉구관내 급수공사(장기계속단가계약)

2) 공사기간 : 2019. 4. 8.(착공일) ~ 2020. 6. 30.(계약일 : `19. 4. 5.)

3) 공사비 변경

구 분	금 액		증·감(원)
	당 초(원)	변 경(원)
도 급 비	***********	***********	*****

4) 도 급 자 : *************

5) 감 리 자 : ************

2. 심의회 개최현황

1) 심의일정 : 2019. 10. 17. 17:00

2) 심의장소 :  급수운영과

3) 심의위원장 : 급수운영과장

4) 심의위원 : 시설6급 김재영, 시설6급 박상권, 시설7급 이한수, 시설7급 윤승구

3. 심의 내용

1) 설계변경의 타당성(물량변동 등) 여부

2) 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부

3) 부대공 적정산정

4. 심의 결과

1) 설계변경의 타당성 : 타당함

2) 계약변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부 : 적정함

3) 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

4) 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본   심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

첨 부 : 1) 설계변경사유서 1부.

2) 설계변경 심의 결정서 1부.

3) 설계변경내역서 1부.  끝.