투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역)

우리 사업소에서 시행중인 『일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2019.3.26 ~ 2019.11.20.

다. 도 급 자 : (사)대한산업안전협회 대표 윤양배 외 1

라. 도 급 비 : 158,530,000원

마.  예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비

(증 20,810,000원)

바. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		용 역 비			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		158,530,000	179,340,000	증)20,810,000
도급비	공급가액	142,072,727	160,990,909	증)18,918,182
	부가세	14,207,273	16,099,091	증)1,891,818
	자문비	2,250,000	2,250,000	0
	계	158,530,000	179,340,000	증)20,810,000

사. 설계변경 사유

○ 내진성능 상세평가 시행 추가

- 대상 시설물 : 일원터널

- 변경 사유 : 최종 자문위원회 자문의견 반영

※ 2014년 내진성능 예비평가 시 내진보강 관찰구조로 판정되어 내진성능 상세평가를 시행하지 않았으나, 정밀안전진단 시에 내진성능상세평가를 시행하도록 되어있어 금회 정밀안전진단에 포함하여 시행

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

주무관	김종범		시설보수과장	10/22 임영철
협조자
시행	시설보수과-6304	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0370	/전송	2040-0308	/	kjb61@seoul.go.kr	/	대시민공개