설계변경 사유서

1. 용 역 명 : 일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역

2. 용역기간 :  2019.3.26 ~ 2019.11.20.

3. 도 급 자 : (사)대한산업안전협회 대표 외 1

4. 도 급 비 : 158,530,000원

5. 변경사유

○ 내진성능 상세평가 시행

- 대상 시설물 : 일원터널

- 변경 사유 : 최종 자문위원회 자문의견 반영

※ 2014년 내진성능 예비평가 시 내진보강 관찰구조로 판정되어 내진성능 상세평가를 시행하지 않았으나, 정밀안전진단 시에 내진성능상세평가를 시행하도록 되어있어 금회 정밀안전진단에 포함하여 시행

6. 변경내역

구 분		용 역 비			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		158,530,000	179,340,000	증)20,810,000
도급비	공급가액	142,072,727	160,990,909	증)18,918,182
	부가세	14,207,273	16,099,091	증)1,891,818
	자문비	2,250,000	2,250,000	0
	계	158,530,000	179,340,000	증)20,810,000