문서번호	토목부-19287
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		장수철	전결 10/24 김용제
협조

옹벽 상부 시설물 누락 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

옹벽 상부 시설물 누락 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

본 공사 시행중 옹벽상부에 설치되는 AL패널 및 매쉬휀스 수량증감이 발생하여 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 11.

○ 도 급 비 : 7,145백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황 (위치도)

□ 변경내용 검토

○ AN판넬 동쪽 수량이 누락되어 있음

○ 내역검토

공 종	규격	단위	당초	변경	수량 (증,감)	증감 금액 (직접공사비)	비고
10. 옹벽보수보강공사		식				33,388,122
4) 외부옹벽난간		식				33,388,122
메쉬휀스(외부옹벽난간)설치	H900*L2090	M	977	481	-496	-25,553,424
옹벽상부 외장재설치	AL패널(3T)	M	403	958	555	85,784,685

○ 공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증감 금액
1. 직접공사비 계	112,624,564	172,855,825	60,231,261
2. 제경비계	20,851,610	30,266,127	9,414,517
순공사원가	133,476,174	203,121,952	69,645,778
3. 일반관리비	7,074,237	10,765,463	3,691,226
4. 이 윤	7,709,589	10,862,585	3,152,996
공급가액	148,260,000	224,750,000	76,490,000
5. 부가가치세	14,826,000	22,475,000	7,649,000
도급금액	163,086,000	247,225,000	84,139,000
관급자재비
총공사비	163,086,000	247,225,000	84,139,000

□ 감리단 검토 내용

❍ 판넬 및 메쉬휀스 물량 산출은 적정한 것으로 판단됩니다.

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증) 84백만원(기계약단가적용)

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.