문서번호	물재생계획과-14460
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
강청금		이한복	10/24 하상문
협조
	주무관		하창곤

행당동 삼부아파트 주변 수해예방사업 검토

2019. 10

물순환안전국

(물재생계획과)

행당동 삼부아파트 주변 수해예방사업 검토보고

성동구에서 추진 중인 ‘행당동 삼부아파트 주변 수해예방사업’

예산 추가배정 요구에 대한 검토결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 위    치 : 성동구 무학초등학교 정문 ∼ 삼부아파트 주변

○ 규    모 : 사각형거 확대개량 □2.0×2.0m ⇒ □3.0×2.0m, L=169m

□2.0×1.5m ⇒ □3.0×1.8m, L=245m

하수관로 확대개량 D600∼1,000㎜ ⇒ D700∼1,200㎜, L=353m

○ 총사업비 : 3,900백만원

○ 사업기간 : 2019. 03. ∼ 2019. 12.

○ 공 정 율 : 43% (2019년 10월 기준)

□ 위 치 도

하수관거 확대·개량

D800~1,200mm L=216m

하수관거 확대·개량

D700~900mm L=137m

사각형거 확대·개량

□2.0×2.0→□3.0×2.0m, L=169m

사각형거 확대·개량

□2.0×1.5→□3.0×1.8m, L=245m

2012년

침수지역

2012년

침수지역

2012년

침수지역

□ 예산요청현황

○ 요 청 액 : 210,585천원

○ 요청사유

- ① 왕십리로 도로횡단구간 가시설 공법 변경 : 증 368,315천원

‣ (당초) TS판넬 → (변경) H-pile+토류벽

‣ 변경사유 : 다수의 지장물로 인해 TS판넬 작업불가

- ② 교통안전시설 및 노면표시 변경 : 증 132,768천원

※ 교통소통대책 용역 및 관련기관(서울지방경찰청, 市 교통운영과, 성동경찰서 및 성동도로사업소) 협의 결과

- ③ PC BOX 기초 및 시공방법 변경 : 증 42,000천원

‣ (당초) 잡석기초 →  (변경) 콘크리트 기초 등

‣ 변경사유 : 지게차 활용불가에 따라 PC박스 수평이동을 위한 기초변경

⇒ 증액된 사업비(총 543,083천원) 중 일부(210,585천원) 재배정 요청

□ 검토결과

○ 본 사업구간은 과거 다수의 침수이력이 있으며, 하수관로 통수능 부족이 원인으로 검토됨에 따라 조속한 정비(확대․개량)가 필요함.

○ 따라서, 시민안전을 위한 침수해소 사업임을 감안하여 적기에 사업을 완료하고자 계약심사 절감액을 재배정하고자 함.

□ 향후계획

○ ’19. 10.: 예산 재배정(서울시 → 성동구)

(단위 : 백만원)

*****	***	****	******	***
************ ******	*********	*********	*******	*

○ ’19. 12. : 자치구 사업시행

붙임 : 예산 재배정 요청공문 1부.  끝.