문서번호	토목부-19460
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		장수철	전결 10/28 代이동훈
협조

자전거도로 안전시설설치 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

자전거도로 안전시설설치 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

본 공사 시행중 자전거도로가 보도공간 사이로 설치됨에 따라 보행인의 안전사고가 우려되어 자전거도로 포장면의 시인성 확보하여 보행인의 안전을 도모코자 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 11.

○ 도 급 비 : 7,145백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황 (위치도)

자전거 도로

❍ 보도부 가운데로 자전거도로가 설치되어 있어서

❍ 보행인과 자전거 저촉 사고가 우려됨

□ 검토내용

○ 수량검토

품 명	규 격	서측(m2)	동측(m2)	합계(m2)	비고
자전거도로 도색	천연세라믹, t=2mm 암갈색	231.6	237.5	469.1

○ 공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증감 금액
1. 직접공사비 계	-	18,684,022	18,684,022
2. 제경비계	-	5,327,494	5,327,494
순공사원가	-	24,011,516	24,011,516
3. 일반관리비	-	1,272,610	1,272,610
4. 이 윤	-	2,135,874	2,135,874
공급가액	-	27,420,000	27,420,000
5. 부가가치세	-	2,742,000	2,742,000
총 공사금액	-	30,162,000	30,162,000

□ 감리단 검토 내용

❍ 자전거도로 유색 포장의 단가 산출은 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치의견

❍ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증)30백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.