문서번호	공공재생과-3961
결재일자	2019.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	특화공간조성팀장	공공재생과장	재생정책기획관		도시재생실장
김방용	신명승	이동일	김승원		04/15 강맹훈
협 조

「남산 예장자락 재생사업」 관련

역사탐방로 조성사업 추진계획

2019. 04

도시재생실

(공공재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

남산 예장자락 재생사업 관련

역사탐방로 조성사업 추진계획

남산일대 역사 콘텐츠를 시민들이 직접 찾고 체험할 수 있도록 현장을 바닥사인 및 표지석 등으로 조성, 역사탐방 프로그램 기반을 만들고자 함

Ⅰ		추진배경

잊혀진 장소를 기억하자는 시민의견 수렴

❍ 예장자락 일대 통감관저, 통감부 등 사라져 간 일제강점기 역사현장 보존

남산 역사콘텐츠를 활용, 역사탐방 공간으로 조성

❍ Negative Heritage, 부끄러운 역사를 드러내 억압과 고통의 역사를 제대로 인식하고 기억하는 공간으로 조성

Ⅱ		추진근거

3.1운동 100주년 기념사업 추진(시장방침 제329호, `16.11.1.)

❍ 남산역사 탐방로 조성사업(남산침탈 과정을 설명하는 구간별 표석 설치)

역사탐방로 조성사업 연계추진(행정2부시장방침 제299호, `17.12.22.)

❍ 남산 예장자락 재생사업과 연계 가능한 주변 역사․문화자원 발굴사업으로 재생효과 극대화

❍ 예장자락 역사적 층위를 정리․바닥에 표시, 인지화를 위한 안내SIGN물 제작 설치

Ⅲ		추진경과

❍ `16.07.	전문가 자문회의(7.8, 7.9, 7.20)

- 주변 역사자원 표석을 의미있게 정비 필요 및 남산 해설사 도입 필요

❍ `16.11.01.	3.1운동 100주년관련 서울시 기념사업 추진계획(안) 결정

❍ `17.02.08.	3.1운동 100주년 기념사업 기자설명회 개최

❍ `17.03.	국치의 길 역사탐방 프로그램 2회 진행

- 1차 : 행정1부시장 등 서울시 직원 30명 참여(3.1)

- 2차 : 서울시 어린이․청소년 발대식 행사 일환 약 140명 참여(3.18)

서울특별시 어린이․청소년 참여위원회 : 청소년 기본법 제5조의2 청소년의 자치권 확대와 서울특별시 어린이․청소년 인권조례 제50조에 따라 어린이․청소년 관련 정책의 수립과정에 어린이․청소년의 참여를 보장하고 그 자치활동의 활성화를 위히여 조직․운영

❍ `17.03.20.	남산 예장자락 역사콘테츠 발굴 용역 착수

❍ `17.08.22.	「국치의길」 역사탐방 프로그램 진행

❍ `17.12.22.	사업계획 변경 방침(남산 예장자락 재생사업 일환으로 추진)

❍ `18.08.29.	독립유공자 후손 동행 답사행사 진행

Ⅲ		추진방향

역사공간 앞에 장소성을 알리는 표지 조형물 설치

❍ 해방 이후 지나온 시간과 도시개발로 가려지고 사라진 역사적 장소 앞에  안내를 위한 표지 조형물 설치

역사 콘텐츠를 안내하는 바닥SIGN 설치로 탐방로 구성

❍ 국치길 : 통감관저터 ~ 일본관사터(예장자락)~노기마레스케 신사(리라초 일대), 경성신사(숭의여대)~조신신궁터(회현자락)

Ⅳ		용역개요

❍ 용 역 명 : 남산 역사탐방로 표지석․안내SIGN 디자인, 제작․설치 용역

❍ 과업대상지 : 중구 예장동 4-1번지 일대

❍ 과업기간 : 계약일로부터 4개월

❍ 주요 과업내용

- 기본조사 및 설치위치 선정

- 표지석․안내(바닥)SIGN 디자인, 제작․설치

Ⅳ		업체선정 및 계약방법

❍ 용역 수행자 : 주식회사 오퍼센트

❍ 소요예산 : 50백만원(부가세 포함)

❍ 계약방법 : 수의계약

- 근  거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호마목 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업과 체결하는 용역계약

- 사  유 : 여성기업인으로 추정가격이 5천만원 이하로, 조속한 협업이 가능하며 원활한 업무수행이 가능하다고 판단하여 수의계약하고자 함

❍ 예산과목 : 공공재생 계획 수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 남산 예장자락 재생사업, 사무관리비

Ⅳ		추진일정

❍ `19.04.	: 용역계약 체결 및 착수

❍ `19.08.	: 역사탐방 프로그램 행사 추진 및 준공

붙 임 : 1. 과업내용서 1부

2. 견적서 1부. 끝.