문서번호	도시철도토목부-11372
결재일자	2019.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
김근수		최진규	11/01 정대현
협 조
	주무관			정중규

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』

설계변경 검토(총차3회, 2차2회, 3차2회)

2019. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』

설계변경 검토(총차3회, 2차2회)

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』시행 중 책임건설사업관리기술자으로부터 계약금액 변경요청이 있어 아래와 같이 검토함

Ⅰ		관련근거

❍ 신승******* 01호(2019.10.28) 하남선 궤도공사 설계변경(총차3회, 2차2회, 3차2회)에 따른 계약금액 조정 요청

Ⅱ		공사개요

❍ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)

❍ 계 약 자 : 화성궤도㈜

❍ 공사기간 : 2018.11.05. ~ 2019.11.04.

❍ 계약금액 : 총차 4,724,441천원

◊계약현황                                                      (단위: 천원)

구 분	총 차	1차계약 (기준공)	2차계약 (진행중)	3차계약 (금회준공)
도 급 비	4,724,441	50,000	1,994,865	2,679,576
계약기간	‘18.11.5 ∼ ‘19.11.04	‘18.11.5∼ ‘18.12.31	‘18.12.26∼ ‘19.11.04	‘19. 1. 21∼ ‘19.11.04

Ⅲ		보고내용

❍ 본 공사 추진 중 아래와 같이 실정보고 사항과 시공물량 정산에 따른 변경내역을 반영하여 변경 계약하고자 함

❍ 실정보고 및 물량정산 내역(총괄)                     (단위:천원)

보 고 내 용	관련근거	변경내역	사업비 증·감
- 궤광버팀재 설치,철거 - 유압식 차막이 설치,철거	도철토목부- 9442(19.9.9)	버팀 수량증가:5.025km 차막이 설치,철거 증가 : 3개소	증 40,770
- EGI가설휀스 설치 제외	도철토목부- 11103(19.10.25)	EGI가설휀스 설치감량 : 1.603km	감 82,100
- 차량기지 배수로 시설변경	도철도목부- 11102(19.10.25)	맨홀설치 감량 :2개소 하수관부설 감량: 38m U형배수로 증가 : 32m	감 10,620
- 궤도성능시험 시행	도시철도토목부- 11079(19.10.25)	궤도성능시험 추가 : 1식	증 28,740
각 공종별 시공물량 정산 (물량 증·감)		-콘크리트 타설량, 레일용접수량, 제표 및 부대공사 등 수량 증·감 발생	감 336
4대 보험료 및 제경비 등 정산		-산재,고용,건강,연금보험료,퇴직공제부금비,환경보존비 등 정산	감 84,040
합 계			감 107,586

❍ 2차계약 변경내역                                              (단위: 천원)

구 분	단위	2차 계약공사
		당 초		변 경		증∙감
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
하수맨홀	개소	3	3,998	1	1,333	감 2	-2,665
하수관로이설	M	40	11,009	2	550	감 38	-10,459
조절식흙막이	M	-	-	4	691	증 4	691
U형플륨관 설치	개	-	-	16	4,600	증 16	4,600
선로제표 (거리,곡선표 등)	개소	98	5,988	147	9,299	증 49	3,311
궤도성능시험	식	-	-	1	28,740	증 1	28,740
소 계			20,995		45,213		24,218
제 경 비			5,878		3,050		-2,828
합 계			26,873		48,263		증21,390

❍ 3차계약 변경내역                                                 (단위: 천원)

구 분	단위	3차 계약공사
		당 초		변 경		증∙감
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
도상콘크리트 타설	㎥	5.846	119,557	5.505	112,595	감 341	-6,962
궤광 버팀재 부설	km	-	-	5.02	17,698	증5.02	17,698
레일용접 수량	개소	885	107,598	881	105,446	감 4	-2,152
제표설치 (거리,곡선표 등)	개소	620	12,525	632	13,563	증 12	1,038
전기안전관리	인	30	3,910	-	-	감 30	-3,910
차막이설치철거	개소	2	7,848	5	19,619	증 3	11,771
EGI휀스설치	m	1,604	64,575	-	-	감1,604	-64,575
소 계			316,013		268,921		-47,092
제 경 비			88,483		65,065		-23,418
4대 보험료 등 최종 정산			177,110		118,644		-58,466
합 계			581,606		452,630		-128,976

Ⅳ		책임건설사업관리기술자 검토의견

❍ 상기 내용과 같이 하남선(5호선 연장)궤도공사(2공구) 2,3차 계약 설계변경 내역을 검토한 결과 계약금액 조정이 타당함

❍ 계약금액 변경 내역                                   (단위:천원)

구 분		총차 계약	1차계약 (기 준공)	2차계약	3차계약
도급비	당 초	4,724,441	50,000	1,994,865	2,679,576
	변 경	4,616,855	50,000	2,016,255	2,550,600
	증·감	감107,586	-	증21,390	감128,976

Ⅴ		조치계획

❍ 상기 내용의『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』계약금액 조정을 책임건설사업관리기술자 검토의견과 같이 변경물량을 반영하여  계약금액 변경을 시행하고자 함

- 총  괄 : 감 107,586천원

- 1차 : 기 준공

- 2차 : 증  21,390천원

- 3차 : 감 128,976천원

Ⅵ		행정사항

❍ 총괄 및 2,3차 공사 계약금액 변경내역을 계약부서(총무부)에 통보하여 변경계약을 시행함.

붙임 : 설계변경 요청 관련 공문 1부.  끝.