투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	시설공사 준공기한연기(전체,10차) 의뢰(방화)

1. 우리부에서 시행중인『방화대교 남단 접속도로 건설공사』와 관련하여 아래와같이 시설공사 준공기한 연기 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사

나. 공사개요 : 도로개설 - 폭 1~3차로, 연장 3,021m

터   널 - 949m (3차로 분리형 495m, 454m)

교   량 - 폭 1~3차로 연장 756m

다. 공사기간 : 전체-2005.10.05.~2014.06.30, 10차-2013.02.25.~2014.06.30

라. 도 급 비 : *********************** ****************

마. 시 공 사 : *******************

바. 감 리 사 : ********

사. 도급비 및 준공기한 연기내용                                 (단위:원)

구 분	도 급 액		사 업 기 간		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경
***	**************	****	*********************	**********************	증488일
***	**************	****	**********************	**********************	증184일

아. 준공기한 연기사유 : 도시계획 변경 및 용지보상 지연

자. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 1) *********** 1부

2) **** 2부.  끝.

	토목부장
주무관	이병환		주무관	이석우		토목부장	06/27 노우성
협조자	주무관	박근우		경리과장	최영미
시행	토목부-12343	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길15 서소문별관 2동3층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2569	/전송	02-3708-2599	/	topseoul@seoul.go.kr	/	부분공개