문서번호	시설관리과-17261
결재일자	2014.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이유찬		이일환	06/27 나태산
협조

설계변경(최종) 심의위원회 개최 결과보고

(2013년 중부관내 긴급누수복구 건설폐기물처리용역)

2013. 06. 27

중부수도사업소

설계변경 심의개최결과보고(최종)

가. 용 역명  : 2013년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)

나. 제 목 : 설계변경 심의(최종)

다. 일 시 : 2014. 06. 27(금) 17:00~18:00

라. 참석자 : 시설관리과장, 시설6급******시설6급******시설6급 ****

시설6급 ****  시설6급 ***

마. 용역개요

용역개요	당 초	변 경	증 ․ 감
건설폐기물운반	3,327㎥	3,002㎥	감 (-)325㎥
건설폐기물처리	6,799톤	6,236톤	감 (-)563톤

바. 계약기간 : 2013.07.16~2014.06.30

사. 용역금액

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증․감
도급비	122,991,050	113,201,000	감(-)9,790,050

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용(최종)

1. 용역 현황

가. 용역명: 2013년 중부수도사업소관내 긴급누수복구공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)

나. 용역개요

용역개요	당 초	변 경	증 ․ 감
건설폐기물운반	3,327㎥	3,002㎥	감 (-)325㎥
건설폐기물처리	6,799톤	6,236톤	감 (-)563톤

다. 계약기간 :  2013.07.16~2014.06.30

라. 도 급 자 :*****************

2. 설계변경 사유보고

가. 건설폐기물 처리 물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 아스팔트,콘크리트 등 폐기물 증감에 따른 폐기물 운반비 증감

- 아스팔트,콘크리트 등 폐기물 증감에 따른 폐기물처리수수료 증감

3.설계변경 검토결과

가. 계약변동(증,감)물량 계약단가 낙찰율 적용

나. 도급액 범위내에서 물량변동

다. 각종 제반 규정 준수여부

붙임: 설계변경내역서 1부.  끝.