문서번호	토목부-20046
결재일자	2019.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		代이상욱A	11/05 김용제
협조

국방부 시설(군검문소)설치 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 11.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

국방부 시설(군검문소)설치 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

본 공사 시행중 국방부 시설(군검문소)의 토목분야 시설을 설치코자 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 10.

○ 도 급 비 : 7,145백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황 (위치도)

동쪽 수방사 군 대체시설

□ 검토내용

○ 공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증감 금액
1. 직접공사비 계		77,263,250	77,263,250
2. 제경비계		20,388,030	20,388,030
순공사원가		97,651,280	97,651,280
3. 일반관리비		5,175,517	5,175,517
4. 이 윤		9,346,840	9,346,840
공급가액		112,173,637	112,173,637
5. 부가가치세		11,217,363	11,217,363
도급금액		123,391,000	123,391,000
관급자재비		15,716,231	15,716,231
총공사비		139,107,231	139,107,231

□ 감리단 검토 내용

❍  발주처의 요구사항으로 수방사 군대체시설 설치는 타당한 것으로 판단됨

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경심의 후 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증) 139백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.