문서번호	건축부-19187
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	문화시설과장	건축부장
이승현	박범규	11/07 임인구
협 조

서울연극센터 리모델링 공사

설계용역 시행계획

2019. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서울연극센터 리모델링 공사

설계용역 시행계획

서울의 대표 문화공간 대학로에 연극인 교류 및 협업공간을 조성하기 위하여 서울연극센터 리모델링 공사 설계용역을 시행하고자 함

1		사업개요

○ 사 업 명 : 서울연극센터 리모델링 공사

○ 위    치 : 종로구 대명길 3 (명륜4가 1번지, 舊 혜화동사무소)

○ 사업내용

- 규 모 : 지상4층, 연면적 1,022.88㎡ (리모델링 890.88㎡, 증축 132㎡)

- 용 도 : 문화 및 집회시설 (다목적 연극지원공간)

○ 사업기간 : 2019. 7. ~ 2021. 10. (설계용역기간 : 180일)

*****************

******************************************

*******************

**********************

위치도	현황사진

2		추진현황

○ ’13. 11.             : 서울시 연극발전 종합계획 수립

○ ’15. 09. ~ ’15.11. : 시설물 정밀안전진단 용역

○ ’18. 11.             : 서울연극센터 리모델링 추진 기본계획 수립

○ ’18. 12.             : 사업 적정성 사전 검토(도기본 건축부)

○ ’19. 02. ~ ’19.04. : 리모델링을 위한 정밀안전진단(진단결과:D등급)

○ ’19. 07.             : 설계공모 공고(문화본부 문화시설과)

○ ’19. 09.             : 설계공모 작품 심사 및 당선작 발표

○ ’19. 10.             : 설계용역 추진 의뢰(문화시설과→도기본 건축부)

3		용역발주 계획

○ 용 역 명 : 서울연극센터 리모델링 공사 설계용역

○ 용역기간 : 2019. 11. ~ 2020. 5.(착수일로부터 180일, 6개월)

******************************

○ 용역계약자(당선자): ㈜건축사사무소 신 대표 신호섭

○ 용역범위

- 건축·구조·토목·조경·기계·전기·정보통신·소방분야에 대한 기본설계(계획,중간), 실시설계

- 각종 심의 및 관계법령에 의한 단계별 행정절차 이행

- 각종 인증(녹색건축, 에너지효율, B/F등) 관련 설계 및 인증 취득

- 과업내용서, 기타 본 과업의 수행을 위하여 발주기관에서 계약당사자와 협의조정 하는 업무

○ 계약방법: 지명공모 당선자와 수의계약(종합계약 등)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제28조(종합계약 등)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항4호자목

4		향후계획

○ ’19. 11.             : 설계용역 계약 및 착수

○ ’20. 05.             : 설계용역 완료

○ ’20. 05. ~ ’20.06. : 건설사업관리용역 및 공사발주

○ ’20. 07. ~ ’21.09. : 공사 시행(14개월예정)

붙임  1. 서울연극센터 리모델링 추진 기본계획(문화시설과) 1부.

2. 설계공모 작품심사 결과보고(문화시설과) 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 설계용역비 산출서 1부.  끝.