“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 아이돌봄포털 구축 용역 월간보고(10월)

1. 서울시 아이돌봄포털 구축 용역관련 10월간 추진실적을 아래와 같이 보고 드립니다.

가. 사업개요

1) 사업기간 : 2019.4.23. ~ 12.18.(8개월, 총 34주)

2) 수행업체 : ㈜제스아이앤씨

3)******************

나. 추진실적(10월, 29주차 포함)                ※ 회의일정 : 매주 화요일 15시

구분	10월 실적 (2019. 10. 1. ~ 10. 31.)				11월 계획
단계 진척	계획	82 %	실적	74 %	94 %
업무 내역	[사업관리] 1. 교육자료 작성 및 교육실시(10/18, 10/25) - 우리동네키움센터 사업담당자 및 종사자 대상 포털 이용방법 2. 종료감리 대응 - 단위 테스트 시나리오 작성 - 클래스 설계서, 인수테스트 계획서, 품질활동 결과보고서 등 제출문서 리스트업 및 준비				[사업관리] 1. 교육자료 작성 및 교육실시(11/15, 11/22) - 우리동네키움센터 사업담당자 및 종사자 대상 포털 이용방법 2. 종료감리 대응 - 현장감리 대응(11.4.~11.8.) - 종료감리 산출물 작성 및 시정조치 실시 3. 사용자, 담당자 매뉴얼 작성
	[설계단계] 1. 화면설계 1) 돌봄지원 사업소개 콘텐츠 수정 2) 정보구조도(IA) 수정 - 보육반장 메뉴 삭제에 따른 콘텐츠 재배치 3) 개발에 따른 설계 수정사항 반영 - 우리동네키움센터 이용현황 대시보드 구성 - 우리동네키움센터 RF 카드 관리 - 담당자 가입화면 구성 - 관리자 화면 기간검색 항목 고도화 등				[설계단계] 1. 화면 설계 1) 개발지원 - 개발작업에 따른 화면 구성 변경 상시 반영 2) 시설정보 등록 - 시설정보 일괄 입력폼 구성 - 취합 시설정보 일괄 등록 3) 시설 담당자 계정 사전 생성
	[구현단계] 1. 디자인 작업 1) 메인 화면 디자인 - 메인화면 모바일 디자인 및 레이아웃 변경 - 아이돌봄 서비스 소개영역 백그라운드 이미지 변경 2) 서브 화면 디자인 수정 - 우리동네키움센터 시설지도 추가 완료 - 우리동네키움센터 상시돌봄 예약현황 완료 - 이용툴팁 디자인 추가 완료 3) 돌봄지원 사업 소개 콘텐츠 디자인 완료 2. 퍼블리싱 작업 1) 메인화면 코딩 완료 2) 서비스 소개 코딩 완료 3. 개발 작업 1) 사용자 화면 - 우리동네키움센터 예약 - 맞춤형 정보서비스 목록 및 조회 완료 - 서울시 통합 GNB 추가 개발 - 홍보.알림 게시판 작업 완료 - 마이페이지(예약 수정, 회원정보 변경) 2) 관리자 화면 - 로그인, 관리자 가입승인 기능 - 조직 및 권한 관리 - 사용자 관리 - 참여단 회원 실적보기 기능 - 우리동네키움센터 예약 프로세스 - 시설관리, 출결관리 개발 3) 연계 작업 - 출결업체 내부 개발서버 간 테스트(10.15.) - 지도 API 연계 개발 완료 - 휴대폰 본인인증 개발				[구현단계] 1. 퍼블리싱 작업 1) 서비스 소개 콘텐츠 퍼블리싱 완료(11.8.) 2. 개발 작업 1) 사용자 화면 - 우리동네키움센터 예약 (중복예약 체크, 예약신청 시 정원체크 테스트) - 맞춤형 정보 서비스(교육프로그램 추가) - 공통사항 · 알림톡 연계모듈 개발 및 테스트 · 보육포털 비밀번호 암호화 로직 적용 · 컨텍스트 환경 디렉토리 구조로 변경개발 2) 관리자 화면 - 관리자 가입 및 승인기능 개발 - 공통사항 · 미사용 기능 및 메뉴 정리 · 알림톡 케이스별 적용 - 시설관리 · 전체 시설관리 교육프로그램 추가 3) 연계 - 아동 교육프로그램 연계 - 지역아동센터 시설정보 연계 개발 4) 보육포털 데이터 이관 5) 웹취약점 점검 대응
기 타	1. 서울시 마을자원 2020년 포털 서비스 관련 협의(10/29, 첨부) 2. 포털 구축 관련 이슈 사항 리스트(첨부) 3. 오픈 준비 회의(10/30, 11/1, 첨부)

붙임   1. 월간업무 보고서(10월) 1부.

2. 주간업무 보고서(29주차) 1부.

3. 월간 및 주간 회의록 1부.

4. 마을자원 포털 서비스 관련 회의록 1부.

5. 포털 구축 관련 이슈 리스트 1부.

6. 오픈 준비 회의록 2부.  끝.

주무관	박지선		초등돌봄운영팀장	최인성		아이돌봄담당관	11/07 강지현
협조자
시행	아이돌봄담당관-14157	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-4817	/전송	02-2133-0733	/	happy_pjs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)