투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울특별시 북부도로사업소장
(경유)
제 목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 변경 요청

1. 기전과-7123호(2015.07.21.)와 관련입니다.

2. 동부간선도로 확장공사(3공구) 교통안전시설물 원인자부담공사와 관련하여 아래와 같이 공사기간 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 교통시설물 원인자부담공사

○ 공 사 명 : 노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 교통안전시설(신호) 원인자 부담 공사

○ 공사기간 : 2015.07.21. ~ 2019.12.31.

○ 위    치 : 노원구 상계동 녹천교 ~ 의정부 시계(수락고가차도)

○ 공사내용 : 철거된 신호기 2기 복구 공사

○ 연장사유 : 수락고가차도 방음벽 공사 공기 연장

붙임  감리단 승인 요청 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	11/11 김용제
협조자	주무관	노순재		주무관	황윤기
시행	토목부-20385	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개