문서번호	건축부-19645
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이원기		代김성권	11/14 임인구
협조

『남부도로사업소 청사 신축공사』실정보고 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(건축부)

『남부도로사업소 청사 신축공사』실정보고 검토보고

******************************************************************************

1		공 사 개 요

공 사 명 : 남부도로사업소 청사 신축공사

위    치 : 금천구 시흥동 961-5 외 8

규    모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 5,360.71㎡

공사기간 : `17.11.20. ~ `19.******

******************************************************************

시공자/감리사 : ㈜신안건설산업 외 2개사/(주)삼우공간건축사사무소 외 1개사

2		실정보고 내용

관련 문서

*************************************************************삼우(도시기반) 제19-1112-1호 (2019.11.12.)

관련 근거

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 공사설명서 공사계약특수조건(Ⅰ) 제10조(설계변경)

- PLAN-A 2019-10-12 방재센터 방화구획 시공방안 및 법적기준여부 검토 회신

- PLAN-A 2019-10-18 커튼박스 및 주민편익시설 옥상 레일설치 검토 회신

**********************************************************************

변경사유

**********************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************

검토내용

- 설계변경 요청 내용 검토

구분		당 초	변 경	검 토 내 용	비고
지상1층 방재센터	벽체	SGP(철재칸막이)	DRY WALL DS2-1	******************* ******************** ** ****************************** *****************************	적정함
		D/WALL(경량벽체)	DRY WALL DS2-1
	창호	SGP(철재문) 3개소	3/FSD 3개소	*********************************	적정함
		************** *************	********* *************
**** *********		************ ******************** ******************** ****************** ******************* *******************	************ ******************* *********** ****************** ****************** ***********	***************************************************	적정함

공사비 증감 비교

- 설계변경 직접공사비 증감 검토                                            (단위:원)

구 분	단위	당 초			변 경			증 감		비고
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	금액
금속공사
커튼박스 (150*150*1.2t)	M	***	******	*********	******	******	**********	*****	*********	계약단가
커튼박스 [360*(600+720)*1.2t]	M	*****	*******	*********	*****	*******	*********	****	*********	계약단가
창호공사
1/FSD	M2	*	*******	*******	*	*******	*********	*	*******	계약단가
3/FSD	M2	**	*******	*********	**	*******	*********	*	*******	계약단가
유리공사	M2
강화유리(5mm)	M2	******	******	*********	******	******	*********	*****	*******	계약단가
유리끼우기-판유리	M2	*******	******	**********	********	******	**********	*****	*******	계약단가
유리주위코킹	M	*******	***	*******	*******	***	*******	*****	******	계약단가
강화유리문	개소	**	*******	**********	**	*******	**********	**	********	계약단가
도장공사
친환경수성페인트	M2	******	******	*********	******	******	*********	******	*********	계약단가
수장공사
철제칸막이(SGP-전체)	M2	******	******	**********	******	******	**********	******	**********	계약단가
철제칸막이문짝(SGP)	개소	*	*******	*********	*	*******	*********	**	********	계약단가
DRY WALL DS3	M2				*****	******	*********	*****	*********	계약+신규
대리석 붙임	M2	******	*******	**********	******	*******	**********	***	*******	계약단가
직접공사비				***********			***********		**********

********************************************************

********************************************************************************

4		건설사업관리단 검토의견

구 분	변경 전	변경 후	증‧감액	비고
직접공사비	*************	*************	**********
간접공사비	***********	***********	*********
공급가액	*************	*************	**********
부가세	***********	***********	*********
도 급 액	*************	*************	**********

******************************************************************************************************************************

********************************************************************************

5		처리의견

책임건설사업관리자의 검토의견에 따라 실정보고건은 승인

실정보고 승인사항은 원활한 공정관리를 위하여 선 조치하고 추후 관련절차에 의거 설계변경 시 금액 확정

붙임: 설계도서 오류 및 내역누락으로 인한 실정보고 승인요청 1부.  끝.