문서번호	체육진흥과-5981
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생활체육정책팀장	체육진흥과장		문화체육정책관
정대권	최병윤	오제성		05/19 황치영
협 조

야간 시민운동을 위한 인프라 구축 지원사업 시범학교(종암중학교) 사업계획 변경사항 검토보고

문화관관디자인본부

(체육진흥과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	시 교육청, 선정학교	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	해당 자치구	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

야간 시민운동을 위한 인프라 구축 지원사업

시범학교(종암중학교) 사업계획 변경사항  검토보고

야간 시민운동을 위한 인프라구축 지원사업과 관련하여, 성북구(종암중학교)에서 보완 제출한 사업계획 변경내용에 대한 검토의견을 보고 드림.

□ 검토경위

○ ‘14.4.11 : 야간 시민운동을 위한 인프라구축 사업계획 제출

〔 성북구(종암중학교) → 시 〕

○ ‘14.5.04 : 야간 시민운동을 위한 인프라구축 지원사업 시범학교 사업계획 및 현장확인 검토보고

- 성북구(종암중학교)가 제출한 사업계획 내용에 대한 검토 및 현장 확인결과, 야간 시민운동을 위한 사업취지와 다르게 골프연습장 설치 등 부적합 시설이 포함되어 있어 지원을 보류함

○ ‘14.5.13 : 야간 시민운동을 위한 인프라구축 사업계획(변경) 제출

〔 성북구(종암중학교) → 시 〕

□ 사업계획 변경내용

변 경 전	변 경 후
◦ 골프연습장 공사 : 48,300천원 ◦ 운동장 정비사업 : 38,700천원 ◦ 조명시설 : 17,200천원 ◦ 설계비 : 5,000천원 소요예산 : 109,200천원	◦ 운동장 정비사업 : 127,810천원 - 배수시설 54,710천원 - 펜스설치 33,495천원 - 스프링클러 등 14,672천원 - 부가세 및 기타 24,933천원 ◦ 조명시설 : 22,190천원 소요예산 : 150,000천원

□ 검토의견

○ 당초 제출된 사업계획 내용이 야간 시민개방을 위한 체육시설 설치보다는 특정인을 위한 골프연습장 설치가 주가 되어 지원을 보류하였으나,

○ 성북구에서 종암중학교와 재 협의후 제출한 변경된 사업계획 내용을 검토한 바, 다수의 시민이 이용할 수 있는 운동장 정비사업과 야간 조명시설을 설치하는 내용으로 사업계획이 보완되어 요청한 사업비 전액을 지원하고자 함.

□ 향후계획

○ ‘14.5월  : 사업비(보조금) 교부 신청(자치구→시)

○ ‘14.5～  : 사업비(보조금) 교부 및 시설 설치공사(시→자치구)

첨부 : 1. 해당학교 현장 사진  1부

2. 야간 시민운동을 위한 인프라구축 세부사업 변경계획 1부.  끝.

종암중학교