문서번호	기전과-6572
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	11/21 김영삼
협조
	주무관		김현태

호암2터널 조명개선공사

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11

남부도로사업소

(기   전   과)

호암2터널 조명개선공사

설계변경 검토보고

『호암2터널 조명개선공사』중 시공방법 변경등 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 호암2터널 조명개선공사

○ 공사개요

- 나트륨등기구 철거 250W×284등

- LED  등기구 설치 (100W×72등, 150W×212등)

○ 도 급 액 : ************

○ 공사기간 : 2019.10.14 〜 2019.12. 2

○ 도 급 자 : *************

□ 설계변경 보고사항

○ 주요 설계변경 내용

공 종	당초	변경	변경사유	비고
등기구 철거․설치	야간작업	주간작업	- 금천경찰서 공사 신고시 주간으로 승인

○ 설계변경 주요 물량 현황

공종	규격	수량		증감	비고
		당초	변경
등기구 철거	야간	284	0		물량 변경없음
	주간	0	284
LED 등기구 설치	야간	284	0		물량 변경없음
	주간	0	284

○ 설계변경 금액

구분	당초	변경	증 감	비고
도급비	***********	***********	************

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후 조명시설 개선, 시설비

□ 보고자 검토의견

○ 등기구 철거 및 LED 등기구 설치 작업이 야간에서 주간으로 변경되어 설계변경 함이 타당하며.

○ 공사 완료에 따른 안전관리비등 제경비 실정산 반영하여 설계변경 코자 하며

○ 위 사항에 대하여 관리단속과에 설계변경 의뢰 및 준공처리코자 함.

□ 향후계획

○ 2019.11.25.    계약 변경의뢰(기전과→관리단속과)

○ 2019.12.  2.    공사준공

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 산재․고용 완납증명서 및 안전관리비 사용내역서 1부.

3. 설계변경 검증확인서 1부.  끝.