투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 내용 알림 (노들섬 특화공간 조성공사 철근콘크리트공사 외)

1. 유탑노들 제19-618(2019.11.20.)호와 유탑노들 제19-621(2019.11.21.)호와 관련입니다.

2.『노들섬 특화공간 조성공사』관련 책임건설사업관리기술자로 부터 하도급 변경계약 검토보고서제출되어 알려드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 하도급 계약내용

하도급공종	하도급업체	하도급 금액 (원)		하도급 계약기간		비고
		변경전	변경후	변경전	변경후
철근콘크리트	㈜티엔에스산업	2,970,880,000	2,970,880,000	2018,3.15~2019.10.20	2018,3.15~2019.11.30
조경공사	마방건설(주)	1,558,809,400	1,558,809,400	2018,7.30~2019.10.20	2018,7.30~2019.11.30
창호유리 금속공사	㈜세화내장건설	1,476,731,900	1,476,731,900	2018,9.5~ 2019.10.20	2018,9.5~ 2019.11.30
도장공사	성우단열도건(주)	250,360,000	250,360,000	2018,9.14~ 2019.10.20	2018,9.14~ 2019.11.30
수장, 목공사	㈜무산산업개발	824,277,400	824,277,400	2018,12.5~ 2019.10.20	2018,12.5~ 2019.11.30
조적, 미장, 타일공사	배명건설(주)	750,948,000	750,948,000	2018,7.30~ 2019.10.20	2018,7.30~ 2019.11.30
방수공사	중앙방수기업㈜, ㈜티엔에스산업	616,000,000	616,000,000	2018.9.5.~2019.10.20	2018.9.5.~2019.11.30
철골공사	반석강업(주)	1,118,546,000	1,118,546,000	2018.3.2.~2019.10.20	2018.3.2.~2019.11.30
창호, 유리, 금속공사	㈜제일씨엔지, ㈜윈스	197,890,000	197,890,000	2019.8.26~2019.10.20	2019.8.26~2019.11.30

불임 : 검토보고서 및 관련서류 각1부.  끝.

	건축부장
주무관	양희식		문화시설과장	代이제관		건축부장	11/21 임인구
협조자
시행	건축부-20147	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	0237082627	/전송	0237082659	/	hanok8303@seoul.go.kr	/	부분공개(5)