문서번호	설비부-19484
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
공혜성		代이호기	12/03 임정규
협 조

『남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화사업 전기공사』

관급자재(콘크리트기초) 납품기한 연기 검토보고

2019. 12.

『남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화사업 전기공사』

관급자재(콘크리트기초) 납품기한 연기 검토보고

토목공사 지연에 따른 관급자재(콘크리트기초) 설치시기가 미도래하여 납품기한을 연기하고자 보고 드림.

1		공 사 개 요

◌ 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화사업 전기공사

◌ 위    치 : 남부순환로 오류IC ~ 매봉초등학교 구간

◌ 공사기간 : 2016.04.14. ~ 2020.12.31.

◌ 규    모 : 가로등 및 교통신호등 이설 및 설치 1식

◌ 공 사 비 : (총차) 481백만원, (2차)364백만원

◌ 시 공 사 : 아산정보통신(주)

◌ 감 리 사 : ㈜동일기술공사&(주)지아이건설기술그룹

2		관 련 근 거

◌ 남부감 제2019-316호, 전기공사 관급자재 납품기한 변경 요청

3		공 사 금 액

□ 관급자재 납품기한 연기내용

품명	납품요구번호	계약업체	계약금액(원)	납품 기한
				당초	변경
******	****************	***	**********	*********	*********

□ 연기사유

**********************

**********************************

□ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 건설사업관리기술자 의견

********************************************************************************************

4		조 치 계 획

************************************************************************.