문서번호	도시철도설비부-11752
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
전문관	송변전과장	도시철도설비부장
문학준	백성현	12/05 구자훈

도시철도 하남선(5호선연장) 차량기지 전차선공사(3차) 시행 계획

2019. 12.

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

도시철도 하남선(5호선연장) 차량기지 전차선공사(3차) 시행 계획

도시철도 하남선(5호선연장) 차량기지 전차선공사 3차분을 다음과 같이 시행

하여 잔여 공정 추진에 만전을 기하고자 함.

■ 사업개요

❍ 공 사 명 : 도시철도 하남선(5호선연장) 차량기지 전차선공사

❍ 공사구간 : 고덕차량기지 유치선 및 입출고선

❍ 계약금액 : **************************************

❍ 공사기간 : ****************************************

❍ 시 공 사 : ㈜태광전력, 강인엔지니어링

❍ 감 리 사 : 세종기술(주) [설계사 : 디투엔지니어링]

■ 추진경위

❍ ’18.  7. 20 : 차량기지 전차선공사 착공

❍ ’18. 11. 23 : 총차 변경계약 [준공기한 연기-계약금액 변경 없음]

❍ ’18. 12. 13 : 1차 준공

❍ ’19. 01. 04 : 2차 계약 및 착공

❍ ’19. 11. 25 : 2차 변경계약[내역변경-계약금액 변경 없음]

- 사 유 : 선행공사 지연으로 효율적 공정관리와 원활한 공사 진행을 위해 차수간 내역 변경

■ 예산집행 현황

❍ 연도별 예산 현황

(단위 : 백만원)

총액	연도별 예산 현황
	소계	2018년	2019년	2021년
*****	*****	***	*****	***

❍ 차수별 예산 집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약 금 액	공사기간	집 행 내 역						잔 액
			계	선 금	기 성 및 준 공
					소 계	기성	노무비 (대금e)	준공
***	*****	*********** *********	*****	***	*****	***	***	***	***
***	***	********** **********	***	***	***		**	***	*
***	***	********** **********	***	***	***	***	***	*	**
***	***	********** **********	***						***
**	***	********** **********	***						***

■ 전차선공사(3차) 계약내용

❍ 공사규모

- 1차분

· 신설 : 지선 10개소, H형강주 52개소, V형트러스라멘빔 2개소 등

· 기타 : 전차선 신설․조정․철거 907m, 조가선 신설․조정․철거 975m 등

- 2차분

· 신설 : 지선 12개소, H형강주 23개소, V형트러스라멘빔 3식, 급전케이블 1,642m 등

· 기타 : 전차선 신설․조정․철거 4,005m, 조가선 신설․조정․철거 3,961m 등

- 3차분

· 신설 : 지선 3개소, H형강주 15개소, 가동브래킷 17식, 급전케이블 558m 등

· 기타 : 전차선 신설․조정․철거 1,508m, 조가선 신설․조정․철거 1,508m 등

❍ 계약금액 및 공사기간

구 분	계약금액 (원)	계 약 기 간	비 고
총차	*************	***********************
1차	***********	***********************
2차	***********	***********************
3차	***********	***********************	금회분
잔여	***********	***********************	예정

■ 책임감리 검토의견

❍ 3차 계약 설계내역 검토결과 적정함

❍ 도시철도 하남선(5호선연장) 차량기지 전차선공사 2차분 공사가 완료(공정률 100%)됨에 따라, 후속공정을 감안하여 3차 공사의 계약을 추진하여 원활한 공정관리가 되도록 함이 타당함.

[ 관련근거 : 서지 하남선(감) 제 19-945호 (‘19. 12. 04] ]

■ 조치계획

❍ 본 공사는 장기계속공사로써 차수별 계약에 의거 진행함에 제2차 계약건의 준공예정일(’19.12.31)이 도래함에 따라 공사의 연속성 확보를 위하여 제3차분 전차선공사를 계약하여 원활한 공사추진을 함으로써 개통일정에 차질이 없도록 시행코자 함.

붙임 : 차량기지 전차선공사 제3차 계약요청 및 감리 검토 보고서 1부. 끝.