투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	하남선(5호선 연장) 정보통신공사 1단계구간(총차,제2차) 설계변경 시행 및 변경계약의뢰

1. 조달청 계약번호 19120221호 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인『하남선(5호선연장) 정보통신공사 1단계구간(총차,2차)』설계변경에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 정보통신공사 1단계구간(총차,2차)

나. 공사위치 : 하남시(5호선 연장 구간)

다. 계 약 자 : ********************

라. 계약기간 : ’18.5.14. ~ ’21.5.12.(2차 : ’19.6.1. ~ ’20.2.29.)

마. 설계변경 내용

구분	설계변경금액(원)			계약기간	비 고
	당 초	변 경	증 감
총 차	5,402,068,296	5,379,688,769	-22,379,527	‘18. 05. 14. ~ ’21. 05. 12.	설계변경
1 차	3,000,000,000	3,000,000,000		‘18. 05. 14. ~ ’19. 05. 30.	준공
2 차	1,693,150,000	1,693,150,000		‘19. 06. 01. ~ ’20. 02. 29.	내역변경
3 차	708,918,296	686,538,769	-22,379,527		’20.2월 계약예정

바. 계약방법 : 장기계속공사

사. 예산과목 : 광역철도 건설(교통개선분담금), 광역철도 건설사업(교통개선분담금),

하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금), 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 감리검토 보고문서(감리단) 1부.

3. 설계변경 내역서(총차, 제2차) 각 1부.

4. 계약변경 합의서 각 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	정덕환		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	12/06 구자훈
협조자	주무관	이승희		재무예산과장	代이강준
시행	도시철도설비부-11787	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6360-4636	/전송	02-768-8902	/	winipcfg@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)