＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 사업소 의견 통보

1. 공사감독2처-20173(19.12.09)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독중인 『종로6가 238-16 ~ 241-1외 5개소 배급수관정비공사』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 설계변경 검토 및 준공검사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 공단보고 및 검토의견

현황 및 문제점	사업소 검토의견	비고
□ 고압걷기 설계 누락, 직관부 확폭(2구간) - 당초 고압걷기공종이 내역에 미반영 되었으며, 지장물(하수도, 통신)로 인하여 확폭굴착(1.5X42.5)구간 발생.	- 설계시 누락된 공종은 설계에 반영을 하고, 실 시공한 수량을 확인하여 설계변경시 반영.
□ 직관부 확폭, 싸인보드카 설치 철거(3구간) - 지장물(통신, 전기)로 인하여 확폭굴착(3.1X5.0, 1.7X4.2)구간 발생. - 보도굴착 구간이나 운반장비 통행로 확보 및 보행자 통행로 우회설치로 인하여 간선도로 1차로를 점용사용하여 차량 및 보행자 안전을 위하여 싸인보드카를 적용.	- 실 시공 및 설치 수량을 확인하여 설계변경시 반영.
□ 굴착도종 변경(A2 → CA2) (4, 6구간) - 터파기시 확인된 콘크리트층(T=15cm)에 대하여 콘크리트 절단 및 깨기량 발생	- 도종 변경에 따른 물량 증감을 확인후 설계변경시 반영
□ 환토 되메우기(1-2, 2, 4, 5, 6구간) - 관리청(종로구청)의 요청에 따라 환토 되메우기 시행	- 관리청(종로구청)의 요청에 따른 되메우기 시행으로 설계변경시 반영
□ 보행도우미 배치(1-1, 2, 5, 6구간) - 이면도로(폭4~6m) 주간 구간으로 작업공간 확보 및 보행자의 안전통행을 위하여 보행도우미를 배치하여 사고예방에 만전을 기함.	- 보행자의 안전 및 작업공간 확보를 위하여 배치한 사항으로 배치현황 확인후 설계변경시 반영.

끝.

	중부수도사업소장
주무관	이원준		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	12/10 허준행
협조자
시행	시설관리과-31544	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2199	/전송	02-3146-2239	/	lwj3245@seoul.go.kr	/	부분공개(5)