아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기 시행[대현문화공원 정비공사(조경)]

우리구에서 시행 중인 『대현문화공원 정비공사(조경)』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 대현문화공원 정비공사(조경)

- 공 사 비 : 금346,511,000원(금삼억사천육백오십일만일천원)

- 공사내용 : 대현문화공원 재정비 3,063㎡(조경수 및 초화류 식재, 재포장 등)

- 도 급 자 : (유)연일종합조경  대표 성문정

나. 공사기간 변경내역

- 당 초 : 2019. 10. 15 ~ 2019. 12. 16

- 변 경 : 2019. 10. 15 ~ 2019. 12. 27

다. 연기사유 : 대현문화공원 내 YES APM 소유의 무대장치 및 분전반 철거 지연 등으로 공사가 지연되었으며, 전반적인 공원레벨 조정 및 옹벽 철거 등 추가공종이 발생함에 따라 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기 필요

라. 연기사유 귀책소재 : 발주청(서대문구청)

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 예산과목

- 지역균형발전을 위한 권역별 도시재생, 신촌연희 도시재생사업 추진, 공원정비사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임   1. 준공기한 연기 의뢰서 1부

2. 합의각서 및 예정공정표 각 1부

3. 준공기한 연기 요청 문서 1부

4. 준공기한 연기 검토보고서 등 각 1부.  끝.

주무관							고진성			신촌연희도시재생팀장					김경민					도시재생과장					代한경순				도시재생추진단장					12/13 박홍표
협조자				주무관						정경자					계약팀장							代정경자					재무과장						김영진
시행			도시재생과-10194									(						)		접수											(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 286															/
전화		02-330-1838						/전송								/													/	대시민공개