스마트 그룹웨어 스마트한 업무환경
			서울교통공사
수신자		수신자참조
(경유)
제목	설비마스터 데이터 정비 사업 추진 방법 변경 협조 요청

1. 관련근거

가.  IT기획처-1544호(’19.5.10.)「전사 기준정보 표준화 추진 계획(안)」

나.  데이터관리처-2260호(’19.8.28.)「설비마스터 데이터 정비 시행 및 교육참석 요청」

다.  데이터관리처-2484호(’19.10.02.)「설비마스터 데이터 정비 관련 회의 결과 보고」

라.  데이터관리처-2500호(’19.10.04.)「설비마스터 데이터 정비 사업 추진 방법 변경」

2. 신뢰도 높은 데이터 확보와 효율적인 설비 마스터 데이터 정비 사업 추진을 위해 아래와 같이 데이터 정비 사업 추진 방법을 변경하여 기한 내 정비 작업을 완료코자 하오니, 각 소속에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 데이터 정비사업 추진 실적(‘19.9.30. 기준)

○ 기간 : ‘19.8.30. ~ 10.31.

○ 추진실적

구분		건수	정비 실적	공정률
설비마스터 데이터값 오류	위치	1,026	290	28.3%
	기능위치	655	11	1.7%
	코스트센터	3,551	586	17.5%
	클래스	19,267	4,785	24.8%
	카탈로그	32,923	8,765	26.6%
	설비유형	121	6	5.0%
	분류체계	23,767	1,178	5.0%
	주작업장	1,744	1,147	65.8%
	플랜트	2,908	1,269	43.6%
	계	85,962	18,037	21.0%
설비, 자산 미연계 오류		101,811	6,926	6.8%
총계		187,773	24,963	13.3%

나. 데이터 정비 사업 추진 방법 변경

○ 진행방법

- 변경 사항

· 기존 : 개별 정비작업 후 실적 제출  ⇒  변경 : 공동작업 추진

- 공동작업 개요

· 장소 : 인재개발원 3층 전산실습실

· 참석대상 : 각 기술사업소 기준정보 담당자 등(붙임 1 참조)

· 근태처리 : 회행 또는 출장처리

· 내용 : 설비마스터 데이터 정비 작업 및 교육

· 일정 : 10월 둘째주 부터 매주 1,2회 시행

구분	일자	시간
10월 둘째주	10.8(화), 10.11(금)	09:00 ~ 18:00
10월 셋째주	10.16(수), 10.18(금)
10월 넷째주	10.22(화), 10.25(금)
10월 다섯째주	10.29(화)

※ 각 소속별 데이터 완료 시 까지 참석(완료 기술사업소는 참석 필요 없음)

○ 실적 제출 기간

- 변경 사항

· 기존 : 정비 실적 매월 둘째주, 넷째주 금요일 데이터관리처 제출

· 변경 : 정비 실적 매주 금요일 데이터관리처 제출(제출일 : ‘19.10.11, 18, 25, 31.)

붙임 : 1. 설비마스터 데이터 정비 사업 추진 방법 변경 1부.

2. 설비마스터 데이터 정비 담당자 명단 1부.

3. 설비마스터 데이터 정비 관련 회의 결과 보고 1부.  끝.

	데이터관리처장
수신자	전기처장, 정보통신처장, 궤도처장, 신호처장, 기계처장, 전자처장, 토목처장, 건축처장, 승강장안전문관리단장, 승강기관리단장, 장비관리단장, 전기1사업소장, 전기2사업소장, 정보통신1사업소장, 정보통신2사업소장, 궤도1사업소장, 궤도2사업소장, 신호1사업소장, 신호2사업소장, 기계1사업소장, 기계2사업소장, 전자1사업소장, 전자2사업소장, 토목1사업소장, 토목2사업소장, 건축1사업소장, 건축2사업소장, 제2관제센터장
과장		차장		처장	10/04
협조자
시행	데이터관리처-2501	(	2019.10.04.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9362	/전송	0263114287	/	pcs2979@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개