투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	계약기간 변경 의뢰[G밸리 근로자문화복지센터 건립 설비공사(장기1차)]

우리 본부에서 시행 중인「G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 설비공사(장기1차)」와 관련하여 계약기간 변경(연장)를 의뢰하니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 설비공사(장기1차)

2. 계 약 자 : ㈜다원이엔에스 박홍식

3. 계약변경 내용

구 분	공 사 기 간		비 고
	당 초	변 경
총 차	2018. 4.17. ~ 2020. 7.13.	변경없음
1 차	2018. 4.17. ~ 2019.12.31.	*************************	********
도급비	********************* **********************	변 경 없 음

4. 예산과목 : 신성장산업과, 신성장산업 육성지원, 산업클러스터 조성 및 활성화, G밸리 근로자 복합공간 조성, 시설비

5. 변경사유 : 선행 공정(건축공사) 공기 연장에 따른 설비공사 공사기간 연장******

붙임   1. 준공기한연장 검토 보고서 1부.

2. 관련 공문 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이병돈		건축설비과장	김은덕		설비부장	12/16 임정규
협조자
시행	설비부-20766	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8629	/전송	02-3708-8659	/	2009spring@seoul.go.kr	/	부분공개(5)