문서번호	교량안전과-21255
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기술점검팀장	교량안전과장
김윤희	위성환	12/19 김종호

- 2019년 마포대교(상류교) 보수공사 -

설계변경 및 추진계획에 대한 보고

2019. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

- 2019년 마포대교(상류교) 보수공사 -

설계변경 및 추진계획에 대한 보고

「2019년 마포대교(상류교) 보수공사」에 대하여 책임건설사업기술자로부터 설계변경보고가 있어 이에 대한 검토 보고임

1		관련근거

○ 설계변경(정산)검토의견서 제출(감리–1277, 2019.12.17)

○ 마포대교 난간 정비계획보고(교량안전과–19286, 2019.11.18)

○ 실정보고 검토 및 조치계획 보고(교량안전과–7684/16111, 2019.10.18./9.20)

○ 마포대교 부수공사 공사예산(추경) 활용계획(교량안전과–13623, 2019.8.2)

2		공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 마포대교(상류교)보수공사

○ 공사기간 : 2019.4.25.~2019.12.25

○ 공사내용 : 교면방수 및 포장 56.28a, 보도포장 630㎡

○ 공 사 비 : 700,847천원

○ 도 급 자 : ㈜엘씨씨코리아이앤씨 대표 조용민

3		설계변경 검토내용

○ 실정보고에 따른 공사 물량 증․감 반영

○ PS항목 공종(아스팔트 및 방수층 제거, 바탕처리)단가 적정 반영

○ 건강보험, 국민연금보험, 등 제경비 정산결과 반영

○ 신규공종 협의단가,낙찰율 단가 적용〈경영지원부19-022(19.12.16)〉

- 투신방지시설,문구판,보도부 재포장 : 낙찰율 86.745% 적용

- 중기운반비,PS단가 : 협의율 93.373% 적용

4		설계변경 검토 결과

□ 공사비 증·감 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총공사비	892,557,240	936,508,735	증	43,951,495
도 급 액	700,847,240	732,985,000	증	32,137,760
관급자재	141,027,000	159,663,735	증	18,636,735
이전비(폐기물처리 등	50,683,000	43,860,000	*	6,823,000

□ 공종별 증·감 내역

공 종	당 초	변 경	증 · 감
1. 교면포장공	132,847,597	99,891,175	감	32,956,422
2. 교면방수공	187,346,552	218,870,572	증	31,524,020
3. 보도부포장공	49,554,666	56,859,507	증	7,304,841
4. 혼합폐기물 상차공	2,326,815	2,124,483	감	202,332
5 교량청소공	557,036	557,036		-
6. 가설공	1,135,144	1,135,144		-
7. 부대공	20,392,679	94,010,566	증	73,617,887
8. P.S 공종	68,111,785	51,852,215	감	16,259,570

□ 공종별 물량 증·감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1. 교면포장공	a	56,28	65,75	** 9.47
2. 교면방수공	㎡	5,628	6,575	증*******947
3. 보도부포장공	㎡	630	540	감**** 70
4. 혼합폐기물 상차공	톤	345	315	*********30
5 교량청소공	㎡	430	430	-
6. 가설공	동	2	2	-
7. 부대공	식	1	1	*
8. P.S 공종	동	7,181	5,840	감) 1,341

5		조 치 의 견

○ 상기 검토결과와 같이 건설사업관리단에서 보고한 설계변경은 적정한 것으로 판단되므로 설계변경하고 정산시행하고자 함

○ 예산 부족(43,952천원)처리방안은 추가예산 마포대교 투신방지시설설치(80,000천원)예산으로 처리코자 함

6		향 후 계 획

○′19.12.19 : 설계변경 및 변경계약 의뢰

○′19.12.20 : 준공검사

○′19.12.25 : 공사준공

붙임 1. 감리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 계약금액 조정 검증확인서 1부.  끝.