부진사업 원인 및 향후계획
사 업 명	1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축	신호처
1. 부진원인	□ 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계용역 입찰 시행 → 유찰(무응찰) 3회 - ‘18.11.14. : 1~9호선 통합관제 시스템구축 설계 용역 입찰공고 ·‘18.12.05. : 시스템구축 설계 용역 PQ 신청서 마감 → 무응찰 - ‘19.01.28. : 시스템구축 설계 용역 입찰 재추진(사업수행능력평 가 조건완화) · 지능형 SMART 1~9호선 통합관제 시스템구축 설계 용역 시행 보고 - ‘19.02.19. : 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설 계 용역 입찰공고 ·‘19.03.12. : 시스템구축 설계 용역 PQ 신청서 마감 → 무응찰 - ‘19.03.13. : 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설 계 용역 2차 입찰공고 ·‘19.03.25. : 시스템구축 설계 용역 2차 PQ 신청서 마감→ 무응찰
2. 향후계획	□ 부진원인 해소 방안 -‘19. 04. 01. : 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 관련 사업발주 전문가 자문회의 · 시스템구축 설계용역 입찰 문제점 분석 및 대응책 모색 - ‘19.05.16 : 서울시 기술용역 타당성심사 · 제996차 기술용역타당성 심사결과 : 용역비 재산정 → 적정 - ‘19.05.21 : 서울시 건설기술심의소위원회 심의 · 제96차 건설기술심의소위원회 : 과업내용서 심의 및 보완(심의의 견 반영) - ‘19.05.23 : 시스템구축 설계용역 검토 및 시행 계획 보고(본부장 결재) - ‘19.05.30 : 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계 용역 시행보고(사장결재) □ 향후계획 -‘19.06.03 : 시스템구축 설계용역 사전규격공개(나라장터) -‘19.06.12 : 시스템구축 설계용역 입찰 공고

3. 관련근거	□ 신호처-1984호(2019.04.12.) 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 관련 사업발주 전문가 자문회의 결과 보고 □ 신호처-2578호(2019.05.17.) 제996차 기술용역 타당성심사 결과 통보 □ 신호처-2656호(2019.05.22.) 제96차 건설기술심의소위원회 심의결과 통보 □ 신호처-2822호(2019.05.30.) 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계용역 시행보고

부 서 명	처장 강봉완 ☏ 9780 팀장 오구식 ☏ 6470 담당 장현철 ☏ 6471