3. 신호설비 개량

<전선로, 선로전환기> : ’18년 3건, ’19년 3건

□ 사업개요

○ 사업내용 : 전선로 및 선로전환기 개량 등

- 전선로 : 개통 후 30년 이상 사용하여 노후된 신호제어용 케이블 및 전선로를 저독성 난연 케이블로 개량

- 선로전환기 : 2~4호선 내구연한 이상 사용된 노후 선로전환기 개량 및 고신뢰 시스템 구축을 위한 2호선 선로전환기 내부 회로 개선

○ 사업규모

- 2018년 : 25,003백만원 전선로 446km(지축차량기지, 지축~홍제, 상계~미아)

- 2019년 : 16,917백만원 전선로 238km, 선로전환기 20대, 회로개선 64대

· 전선로 : 독립문~약수 125Km, 길음~충무로 113Km

· 선로전환기 : 20대, 선로전환기 내부 회로개선(2호선 64대)

□ 2018년 계속사업 추진

○ 추진상황(’19.8.20 기준)

- 공정률 (계획/실적)

· 지축기지(46.8%/65%), 지축~홍제(25.8%/49%), 상계~미아 (26.5%/29.1%)

- 예산집행 현황(’19.8.20기준, 단위 : 천원)

예산현액	원인행위액	지출액	집행율	비 고(준공예정)
25,003,000	19,940,009	8,438,236	42.3%	’19.12 완료

□ 2019년 신규사업 계획

구 분		2019년																																																				비고
		~’18.12월				1월				2월				3월				4월			5월				6월			7월					8월				9월			10월				11월					12월
① 전선로(독립문~약수) 개량 ’19.12월말 공정률 40%(’20.계속사업)
	• 설계 VE검토																																																				완 료
	• 계약심사 및 계약체결																																																				진행중
	• 착공																																																				미도래
	• 공사시공																																																				미도래
	• 준공 및 준공검사																																															’20.12					미도래
② 전선로(길음~충무로) 개량 ’19.12월말 공정률 40%(’20.계속사업)
	• 설계 VE검토																																																				완 료
	• 계약심사 및 계약체결																																																				진행중
	• 착공																																																				미도래
	• 공사시공																																																				미도래
	• 준공 및 준공검사																																															’20.12					미도래
③ 선로전환기 개량
	• 현장조사 및 설계																																																					완 료
	• 계약심사 및 계약체결																																																					진행중
	• 착공																																																					진행중
	• 공사시공																																																					미도래
	• 준공 및 준공검사																																																’19.12					미도래

○ 예산집행 현황(’19.8.20기준, 단위 : 천원)

예산현액	원인행위액	지출액	집행율	비 고(지출예정)
16,420,000	479,806	65,139	0.4%

○ 사업 추진실적(~’19.8.20까지)

- 노후 전선로 개량공사(2건)

· 서울시 계약심사 및 설계VE(경제성검토)심의 완료(3/13)

· 입찰참가자격 사전심의 완료(4/8), 계약 준비중

- 선로전환기 개량 공사

· 시행방침(사장) 수립 완료(3/14), 서울시 계약심사 완료(4/19), 발주품의 준비 중

· 지급자재 공고 및 개찰 완료, 계약완료(6/13)

· 제작승인도 승인 통보 완료(7/15)

· 선급금 지급( 65,139,568원 )

- 선로전환기 내부회로 개선

· 서울시 계약심사 완료(5/15), 구매조달처 계약의뢰(6/10), 개찰완료(6/28),

· 계약 완료(7/6) 및 물품 제작 중

○ 향후계획 및 부진사업 만회대책(’19.9월 이후)

- 노후 전선로 개량공사 2건(3호선 독립문~약수, 4호선 길음~충무로)

· ’19. 8월 : 계약의뢰 및 공고

· ’19. 9월 ~ : 계약, 착공 및 공사 시행

- 선로전환기 개량 공사

· 개량공사 : 준공(‘19.12월)

· 지급자재 : 납품완료(‘19.09월)

- 선로전환기 내부회로 개선

· ’19. 9월 : 물품 제작공정 완료

· ’19. 11월 : 납품 및 현장설치 완료

작 성 자	신호처장 : 강봉완 ☎6311-9780 부장 : 김정일 ☎9781 담당 : 서지현 ☎9784