안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	2019년도 사업계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 기획처-22760호(2018.10.19.)「2019년 경영목표 및 사업계획 수립지침 통보」

나. 기획처-37호(2019.01.02.)「2019년도 경영목표 및 사업계획 통보」

2. 2109년도 신호처 사업계획 중 단위사업 1건에 대하여 다음과 같이 사업계획을 변경하여 추진하고자 합니다.

대상사업	변경사항	비고
1~9호선 ‘지능형 SMART 통합관제’ 구축 (P353)	◦ 사업기간: 설계용역 과업일정 변경 - 시스템 구축 설계용역 공고 3회 유찰(무응찰)로 인한 과업일정 변경 ※ 관련근거: 신호처-2685호('19.05.23.) 「『1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축』 설계용역 검토 및 시행 계획 보고」

붙임: 2019년도 사업계획 변경요청 자료 1부.  끝.

과장		부장		처장		본부장	11/27
협조자
시행	신호처-5934	(	2019.11.27.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9786	/전송	0263114628	/	sdhyun@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사