[1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축]

사업계획 변경요청

○ 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계용역 수행 일정을 변경 추진 하고자 함.

□ 관련근거

○ 신호처-1984호('19.04.12.)「1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 관련 사업발주 전문가 자문회의 결과보고」

○ 서울시 기술심사담당관-9596호('19.05.16.)「제996차 기술용역 타당성심사 결과 통보」

○ 서울시 기술심사담당관-9844호('19.05.21.)「제96차 건설기술심의소위원회 심의결과 통보」

○ 신호처-2685호('19.05.23.)「‘1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축’ 설계용역 검토 및 시행 계획 보고」

□ 변경내용

○ 요청사항 : 시스템구축 설계용역 과업일정 변경

변경 전	ㅇ 시스템분야 설계용역 발주 및 완료 : ~2019.09.30. ※ 2019년도 성과관리계획 p.353	용역기간 180일
변경 후	ㅇ 시스템분야 설계용역 발주 및 완료 : ~2020.05.30. ㅇ 용역과업기간 : 2019.08.05.~2020.05.30.	용역기간 300일

○ 변경사유

- 2019년 3월 까지 : 시스템구축 설계용역 입찰 공고 3회 실행 → 유찰(무응찰)

- 2019년 4월~5월

· 사업발주 전문가 자문회의

· 서울시 기술용역 타당성심사 요청 및 결과 수신

· 서울시 건설기술심의소위원회 심의 요청 및 결과 수신

- 2019.7.31. : 시스템구축 설계용역 계약체결

월별 세부계획 변경내역

월	변경 전			변경 후
	계획(%) (공정율)	추진내용		계획(%) (공정율)	추진내용
1월	5	⋅시스템구축 설계 용역 발주		5	⋅시스템구축 설계 용역 발주
2월	5	⋅시스템구축 설계 용역 발주		5	⋅시스템구축 설계 용역 발주
3월	5	⋅시스템구축 설계 용역 발주		5	⋅시스템구축 설계 용역 발주
4월	5	⋅시스템구축 설계 용역		5	⋅시스템구축 설계 용역 발주
5월	10	⋅시스템구축 설계 용역		10	⋅시스템구축 설계 용역 발주
6월	10	⋅시스템구축 설계 용역		10	⋅시스템구축 설계 용역 발주
7월	10	⋅시스템구축 설계 용역		10	⋅시스템구축 설계 용역 발주
8월	10	⋅시스템구축 설계 용역		10	⋅시스템구축 설계 용역
9월	10	⋅시스템구축 설계 용역		10	⋅시스템구축 설계 용역
10월	10	⋅시스템구축 공사 발주		10	⋅시스템구축 설계 용역
11월	10	⋅시스템구축 공사 발주		10	⋅시스템구축 설계 용역
12월	10	⋅시스템구축 공사 발주		10	⋅시스템구축 설계 용역

□ 별첨: 사업계획서(조정)

				1~9호선 지능형 SMART 통합관제 구축

□ 사업개요

○ 1~9호선 운영기관별, 호선별, 장소별로 분리된 종합관제소를 공간적, 기능적으로 통합하는 지능형 SMART 통합관제시스템 구축

□ 추진내용

○ 1~9호선 관제설비(시스템분야) 1식 구성

- 운영기관별, 호선별 분리운영에 따른 효율성 저하

- 복합환승역 사고발생시 신속한 통제·관리 및 일괄 전파, 대응 어려움

- 기존 관제설비 노후로 개보수 비용 필요, 합리적인 재원 투입방안 필요

○ 건축분야와 시스템분야의 설계용역 및 시공 분리 발주 관리

○ 사업비/물량 : 14,656백만원(2019년도)

- 건물신축(11,820백만원), 시스템구축(2,836백만원) 발주 및 계약

□ 월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획
		1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건축 분야	설계용역
	건축신축 발주/계약
시스템 분야	설계용역 발주/계약
	설계용역

□ 연도별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년
사업비/물량	3,668백만원/2식	14,656백만원/2식	48,155백만원/2식

신호처	처장 강봉완 ☏9780 팀장 오구식 ☏ 6470 담당 장현철 ☏ 6471