문서번호	공원조성과-15797
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원개발팀장	공원조성과장
박계현		허현수	12/19 유영봉
협 조
	주무관			정현배

「경의·경춘선숲길 사업효과분석 용역」

설계변경 검토 보고

2019.12.

푸른도시국

(공원조성과)

「경의·경춘선숲길 사업효과 분석 용역」

설계변경 검토 보고

「경의·경춘선숲길 사업효과 분석 용역」 수행 중 “추가 과업 승인건”에 대한 설계변경 요청건이 있어 이를 검토하고 보고드림. 관련공문 : 그린포엘 제19-12-1601(2019.12.16.)호, 「설계변경 요청 건」

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 경의·경춘선숲길 사업효과분석 용역

❍ 용역기간 : 2019.02.28. ~ 2019.12.31

❍ 용역금액 : 87,843천원

❍ 용 역 사 : ㈜그린포엘 대표자 김미후

□ 추진경위

❍ ‘19.02.28 : 용역 착수

❍ ‘19.03.26 : 착수보고회 개최

❍ ‘19.10.02 : 중간보고회 개최

□ 보고 내용

❍ 설계변경 검토

- 설계변경 사유 : 착수·중간 보고회 시 용역사 추가 과업 승인 및 반영

⇒ 추가과업내용 : 공원 동·식물상 조사 및 소음측정, 도시열섬 조사 등

- 계약금액 및 용역기간 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	87,843	97,764	(증) 9,900
용역기간	2019.02.28.~2019.12.31	2019.02.28.~2019.12.31	변경없음

❍ 용역 추과 과업 수행에 따른 용역 설계변경에 대하여, 낙찰차액(9,900천원)을        사용하여 설계변경 시행 하고자 함.  끝.

붙  임  설계변경 요청 공문 및 변경내역서 각 1부.  끝.