안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	고신뢰 선로전환기 관련 공정회의 결과 보고

1. 관련근거

가. 신호처-20229호(2018.08.29.) 2018년 선로전환기 장애분석 및 대책(사장방침)

나. 계약번호********5AF800(2019.07.11)『선로전환기용 계전기 제작구매 설치』

2. 2호선 고신뢰 선로전환기 관련 공정회의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일자: 2019.10.10.(목) 15:00~16:30

나. 장소: 신호처 사무실

다. 참석자

- 신호처: 신호처 박건원 차장, 권부석 과장,

고동석 과장, 서지현 주임

- 유경제어: 강양훈 차장, 윤을영 과장

라. 회의결과

공정회의 사항

안건1) 고신뢰 선로전환기 유지보수 매뉴얼을 교육시행 전 제출 요망

결과☞10/30 까지 초안 완료하겠음(유경제어)

안건2) 고신뢰 선로전환기 작업 절차서 제출 요망

결과☞ 10/14 까지 작성하여 제출하겠음(유경제어)

안건3) 현장설치 작업 관련하여 아래내용을 작업 절차서에 반영 사항

- 기계실 Spark killer 제거 요망(사업소 협조)

- 모터 D 단자(수동스위치 회로방면)를 청색단자를 Neutral 설정

- 외부케이블 피복은 실내에 5cm 이상 유지하여 작업 요망

- 현장배선작업 시 청결상태 유지

- 페룰 등 케이블 터미널 규격품 사용

- 주름관 관로방면 우레탄 폼 처리

- 각종 나사 부분 풀리지 않도록 록킹 페인트 처리

- 안전준수사항(소화기 비치 준비) 포함

결과☞ 작업절차서에 반영하겠음(유경제어)

안건4) Spark killer 설치에 대한 제작사 기술검토 의견 필요

결과☞ Spark Killer 설치에 대한 이견 없으며 문서화 하겠음(유경제어)

안건5) 배선용 차단기 등 국산화 검토

결과☞ 검토 결과 당장은 국산화가 어려워 기존대로 진행하겠음(유경제어)

안건6) 모터 C/D 단자 분리 칸막이(Separator)는 공장에서 설치하지 않고 현장 여건에

따라 필요시에 만 설치(공사 요구사항)

결과☞ 준수하고 작업 절차서에 반영하겠음(유경제어)

안건7) 현장점검 및 준비작업 결과 제출 요망

결과☞ 특이사항 등 정리해서 제출하겠음(유경제어)

붙 임: 회의 참석자 서명부 1부. 끝.

주임		차장		처장	10/14
협조자
시행	신호처-5187	(	2019.10.14.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9784	/전송		/	seo1808@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사