사업계획 변경요청

□ 변경 개요

○ 사 업 명 : 상황공유 영상시스템 확대

○ 관련 근거

- 정보통신처-2479호(2017.05.17.) “양 도시철도 운영기관 통합에 따른 관제소 상황공유 및 보고체계 구축(안)”

- 사장방침-129호(2017.07.14.) “차량, 기술본부 상황공유체계시스템 확대설치(안)”

- 정보통신처-4885호(2019.08.07.) “상황공유(영상회의시스템) 증설 관련 수의계약 시행(안)”

- 사장방침-1126호(2019.10.24.) “상황공유 및 보고체계 확립을 위한』 모바일 영상회의

시스템 구축(안)”

○ 변경 사유

- 전 부서 및 직원이 활용 가능한 모바일 기반의 영상회의 시스템으로 확대 변경

○ 변경 사항

구 분	당 초	변 경	비 고
내 용	고객서비스, 승무 및 기술본부 현업 등 77개소	1)종합관제단장, 기술 분야 관리단 및 9호선 운영부문 등 5개소 설치(완료)	기술본부장 지시사항
		2)모바일 영상회의 시스템 구축	사장 지시사항

- 월별 세부 계획 변경

구 분	당 초	변 경		비 고
		1) 5개소	2) 모바일
기획 및 방침 수립	2019. 1.~2.	2019. 8.	2019. 10.
현장 실사 및 규격서 작성	2019. 3.~4.	2019. 8.	2019. 10.
발주 및 계약	2019. 5.~7.	2019. 8.	2019. 11.~12.
시스템 구축	2019. 8.~11.	2019. 9.	2019. 12.~2020. 01.

□ 변경 세부 내용

붙 임

사 업 명

상황공유 영상시스템 확대

사업개요

○ 기 도입되어 운영 중인 상황공유체계시스템에 기능 추가 및 영상장비 확대 구축으로 상황공유를 빠르고 신속하게 전달 제공하고자 함

추진내용

○ 상황공유 영상시스템 방침 수립

- 정보통신처-2479호(2017.05.17.) “양 도시철도 운영기관 통합에 따른 관제소 상황공유 및 보고체계 구축(안)”

- 사장방침-129호(2017.07.14.) “차량, 기술본부 상황공유체계시스템 확대설치(안)”

- 정보통신처-4885호(2019.08.07.) 『상황공유(영상회의)시스템 증성 관련 수의계약시행(안)』

- 사장방침-1126호(2019.10.24.) 『상황공유 및 보고체계 확립을 위한』 모바일 영상회의 시스템 구축(안)』

○ 추진 경과

- 1단계(5개소) : 사장실, 안전상황실 ~ 종합관제센터 간 구축(`17.5)

- 2단계(14개소) : 차량, 기술본수 현업 간 확대설치(`17.12)

- 3단계(5개소) : 종합관제단, 기술분야 관리단, 9호선 운영부문 확대설치(`19.9)

- 4단계(추가) : 모바일 영상회의 시스템 구축(`20.1 준공 예정)

사 업 비

사업비 / 물량

월별 세부계획

세 부 내 용	추진 일정	월 별 추 진 계 획
		1/4			2/4			3/4				4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11		12
	공정률								10		30	30		40		70
방침 수립									1)			2)
발주 및 계약										1)				2)
시스템 구축											1)						2)

정보통신처	처장 김기병 ☏ 9800 부장 윤승호 ☏9805 담당 김다인 ☏9807

월별 세부계획 변경내역

월	변경 전			변경 후
	계획 (공정률)	추진내용		계획 (공정률)	추진내용
1월	0	기획 및 방침 수립
2월	0	기획 및 방침 수립
3월	2	현장 실사 및 규격서 작성
4월	5	현장 실사 및 규격서 작성
5월	10	발주 및 계약
6월	20	발주 및 계약
7월	30	발주 및 계약
8월	45	시스템 구축		10	1)방침 수립, 발주 및 계약
9월	60	시스템 구축		30	1)단말기 설치
10월	80	시스템 구축		30	2)방침 수립
11월	100	시스템 구축		40	2)발주 및 계약
12월	-			70	2)계약 및 시스템 구축