하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	오금지구 지적확정측량 용역 계약변경(금액 및 기간) 시행 검토

1. 한국국토정보공사 서울지역본부 지적사업처-5670(2019.12.11.)와 관련입니다.

2. 우리공사와 지적확정측량 용역 계약체결하여 업무 수행중인 한국국토정보공사로부터 오금지구 계약변경 관련 서류가 제출되어 아래와 같이 계약금액 및 계약기간 변경 시행하고자 합니다.

가. 계약변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약금액	151,998,000원	148,181,000원	감 3,817,000원
계약기간	2018.08.31.~2019.12.31	2018.08.31.~2020.12.31	1년 연장

나. 계약변경 사유

- 계약금액 : 세계측지계 좌표값 변환으로 인한 경미한 면적 변경과 지적기준점 측량 및 매설 수량 감소

- 계약기간 : 지적확정을 위한 측량업무가 현황측량 결과에 따른 개발계획 및 실시계획 변경, 재시공, 측량검사기간(서울시, 관할구청 협의) 등으로 인한 절대공기 부족

붙임  1. 오금지구 지적확정측량용역 변경계약 서류 제출 1부

2. 오금지구_수행자별_산출내역(변경계약) 1부.  끝.

부 원						용지보상부장				보상처장		12/20
		유지학						김달호			정세윤
협조자

시행			용지보상부-2963				(2019.12.20)			접수				()
방침번호
우	06336			서울시 강남구 개포동 14-5								/	www.i-sh.co.kr
전화		3410-7869			전송	02-3410-7869		/	youjak@i-sh.co.kr					/	공개