문서번호	시설보수과-6729
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
조호영		代신동헌	12/24 김영삼
협 조
	주무관			신동헌

2019년 도로시설물 보수공사 건설폐기물처리용역(남부) 설계변경(최종) 검토 보고

2019.  12.

남부도로사업소

(시설보수과)

2019년 도로시설물 보수공사 건설폐기물처리용역(남부)

설계변경(최종) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인「2019년 도로시설물보수공사 건설폐기물 처리용역(남부)」과 관련하여 물량변경에 따른 설계변경(최종)을 시행코자 함

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 2019년 도로시설물 보수공사 건설폐기물 처리용역(남부)

- 처리물량 : 운반 : 2,871㎥ / 처리 : 6,737Ton

- 용역기간 : 2019. 4. 4. ~ 12. 31.

- 도 급 액 : 159,980천원

- 도 급 사 : 우광개발(주) 대표 임태권

□ 설계변경 내용

○ 설계사유 :

- 현장(9개소)에서 처리업체까지 실 운반거리 적용

- 실 시공수량 정산

가. 실 운반거리 적용

-  관련근거 : 과업내용서(3.2.2) 다)

· 폐기물운반거리는 현장에서 처리업체까지의 운반거리(30km)를 적용하며 운반거리는 30km미만인 경우 실 운반거리로 변경 정산한다.

- 운반거리 산정

· 공사현장별 폐기물 반출 위치에서 처리업체(우광개발)까지의 실 운반거리를 공사현장 9개소의 평균거리로 적용하고자 함.

- 현장별 실 운반거리 현황 (별첨참조)

연 번	공 사 명	현 장 위 치	처리업체까지 거리(km) (부천시 신흥로511번길 165-0)
1	일상유지보수공사(터널,복개)	가산동 505-3	13.8
2	일상유지보수공사(교량,고가)	가양대교남단	15.2
3	시흥천1,2복개 보수공사	금천구 시흥동 1000-81	31.5
4	봉천천복개 보수공사	관악구 봉천동 976-9	21.8
5	대방천복개 보수공사	영등포구 신길동 417-1	17.6
6	여의교지하차도 보수공사	동작구 대방동 88-4	20.3
7	신사고가 보수공사	강남구 신사동 667	26.9
8	구로교외3개소 보수공사	서울 영등포구 여의도동 여의상류IC	24.8
9	사업소 관내 직영보수	영등포구 도림로145	17.5
	계		189.4
	평균거리		21.04
	적 용		21

※ 일상유지보수공사 2개소는 중간집하장에서 처리업체까지 운반거리 적용

나. 실 수량 정산 (폐기물 물량 집계 참조)

-  도로시설물 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도) 등 9개소

· 실 시공에 따른 수량 정산

□ 설계변경 현황

○ 주요변경 내역

구 분	수 량		단 가(원)
폐아스콘(야간)	당초	30km	23,061
	변경	21km	19,705
폐콘크리트(야간)	당초	30km	23,240
	변경	21km	19,980
혼합폐기물(주간)	당초	30km	20,176
	변경	21km	16,971
혼합폐기물(야간)	당초	30km	23,061
	변경	21km	19,705

- 운반비 산정

- 물량 증·감

공 종	단 위	수 량		증․감
		당초	변경
폐아스콘	톤	5,500	5,224	(감) 276
폐콘크리트	톤	694	529	(감) 165
혼합폐기물	톤	543	392	(감) 151

○ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총 용 역 비		159,980,000	128,260,000	(감)31,720,000
도급비	공 급 가 액	145,436,364	116,600,000	(감)28,836,364
	부가가치세	14,543,636	11,660,000	(감) 2,883,636
	계	159,980,000	128,260,000	(감)31,720,000

○ 소요 예산과목별 현황

(단위:천원)

예 산 과 목	금 액		증․감	비 고
	당 초	변 경
터널시설관리,도로시설물(터널복개,지하차도,세척)일상유지보수,시설비	36,512	13,002	감) 23,510	사업소 관내 직영 포함
교량관리,일반교량관리,교량시설물일상유지보수,시설비및부대비,시설비	13,633	13,633	-
도로시설관리,하천복개구조물관리,시흥천1,2복개보수,시설비및부대비,시설비	21,311	21,311	-
도로시설관리,하천복개구조물관리,봉천천복개보수,시설비및부대비,시설비	35,937	35,937	-
도로시설관리,하천복개구조물관리,대방천복개보수,시설비및부대비,시설비	23,531	15,321	감) 8,210
도로시설관리,지하차도시설관리,여의교지하차도보수,시설비및부대비,시설비	18,505	18,505	-
교량관리,고가차도및입체교차로관리,신사고가보수,시설비및부대비,시설비	3,084	3,084	-
교량관리,일반교량관리,구로교외3개소보수,시설비및부대비,시설비	7,467	7,467	-
계	159,980	128,260	감)31,720

□ 행정사항

○  운반거리 및 계약물량 증·감에 따른 설계변경 내용으로 우리사업소        관리단속과에 재계약 의뢰하고자 함.

붙  임 : 1. 설계변경내역서(사업별 폐기물량현황 포함) 1부.

2. 실운반거리 현황 1부.  끝.