하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	강남서초센터장
(경유)

제목	변경계약체결 통보(수서1,6단지 보도블록 교체공사 건설폐기물 처리용역)

1. 강남서초센터-9401(2019.12.04)호와 관련입니다.

2. "수서1,6단지 보도블록 교체공사 건설폐기물 처리용역"에 대하여 아래와 같이 변경계약     을 체결하고 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아   래 -

구 분	당 초	변 경	비 고
기 간	2019.10.28 ~ 2019.12.06	2019.10.28 ~ 2019.12.16	(증) 10일

붙임  용역변경계약서.  끝.

	계 약 부 장

부 원						계약부장			12/05
		이귀자						이우호
협조자

시행			계약부-21105				(2019.12.05.)			접수	강남서초센터-9479			(2019.12.06.)
방침번호
우	06336			서울특별시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02)3410-7200			전송	02)3410-7203		/	kyjlee@i-sh.co.kr					/	공개