“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	어르신복지과-31891		주무관	어르신정책팀장		어르신복지과장		복지생활국장		부구청장
			권해주	배근희		임동호		이광우		전결 12/31 하철승
등록일자	2019.12.31.
결재일자	2019.12.31.
공개구분	부분공개(5)
			협조자
					재무과장		지영애
					계약팀장		이영순

세곡 커뮤니티센터 조경 공사 수의계약 계획

		관련근거

▢ 세곡동 커뮤니티센터 신축공사 2차 설계변경 및 전용계획(어르신복지과-30933)

▢ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

		공사개요

▢ 사 업 명 : 세곡 커뮤니티센터 조경 추가 공사

▢ 위    치 : 강남구 헌릉로 590길 68(세곡동 521-1, 커뮤니티센터)

▢ 기    간 : 착수일로부터 100일 이내

▢ 소요예산 : 금55,000,000원

▢ 계약업체 : 예인조경개발주식회사

- 소 재 지 : 서울시 영등포구 국회대로72길 17, 411호(여의도동, 케이씨씨파크타운)

- 업체선정방법 : 수의계약 관리시스템에 의거 선정된 업체

▢ 수의계약 사유 :

- 세곡 커뮤니티센터 조경 추가 공사 금액이 수의계약 대상금액이고(여성기업)

- 연속적이고 신속한 처리와 하자발생시 동일한 사업현장에서 책임구분이 명확하지 않고,

- 기존 식재한 구목과 조화로운 식재가 가능하도록 본 공사 당초 계약업체인 (예인조경개발주식회사)와 수의계약을 체결하고자함.

▢ 내    용 : 남천, 회양목, 잔디식재 등 총18종의 관목 지피류 식재

2019.   12.   .

	강 남 구
(		어르신복지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	•「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 제5호 • 세곡동 커뮤니티센터 신축공사 2차 설계변경 및 전용계획(어르신복지과-30933)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 세곡 커뮤니티센터 신축공사
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	․ 검토완료
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	․ 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : √ ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( √ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------- ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( √ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	해당없음

세곡 커뮤니티센터 조경 공사 수의계약 계획

세곡 커뮤니티센터의 조경공사가 동절기 식재로 인한 하자 예방을 위해, 추위에 관한 관목식재 공사를 설계변경후 봄철에 추진하고자 함

Ⅰ		관련근거

▢ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

▢ 세곡동 커뮤니티센터 신축공사 2차 설계변경 및 전용계획(어르신복지과-30933)

Ⅱ		추진배경

▢ 현재 세곡 커뮤니티센터 신축공사는 사고이월 예산으로 재 사고이월 불가

▢ 동절기 식재공사로 인한 하자예방을 위해 설계변경

구 분 (계약업체)	변경내용		도 급 금 액
	공 종	변경사항	변 경 전	변 경 후	증감액
조경공사 (예인조경개발 주식회사)	식재공사	추위에 약한 관목, 지피, 잔디류 등 삭제	227,987,510	226,958,270	-50,311,690 (증감률 22.1%)

Ⅲ		공사개요

▢ 사 업 명 : 세곡 커뮤니티센터 조경 추가 공사

▢ 위    치 : 강남구 헌릉로 590길 68(세곡동 521-1, 커뮤니티센터)

▢ 기    간 : 착수일로부터 100일 이내

▢ 수의계약 사유

- 세곡 커뮤니티센터 조경 추가 공사 금액이 수의계약 대상금액이고(여성기업)

- 연속적이고 신속한 처리와 하자발생시 동일한 사업현장에서 책임구분이 명확하지 않고,

- 기존 식재한 구목과 조화로운 식재가 가능하도록 본 공사 당초 계약업체인     (예인조경개발주식회사)와 수의계약을 체결하고자함.

▢ 계약업체

- 업 체 명 : 예인조경개발주식회사

- 소 재 지 : 서울시 영등포구 국회대로72길 17, 411호(여의도동, 케이씨씨파크타운)

- 업체선정방법 : 수의계약 관리시스템에 의거 선정된 업체

▢ 참가자격 : 건설산업기본법에 의한 조경식재공사업 면허소지업체

▢ 내    용 : 남천, 회양목, 잔디식재 등 총18종의 관목 지피류 식재

Ⅳ		소요예산 및 예산과목

▢ 소요예산 : 금54,896,000원

▢ 어르신복지과, 노인 복지 증진, 노인복지관 시설 및 경로당 확충,

강남 어르신행복타운 건립, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅴ		행정사항

▢ 공사 5천만원 이상으로 계약심사 의뢰 : 재무과

▢ 수의계약 의뢰 : 재무과

붙임 : 1. 계약심사결과통보서 및 내역서 각1부.

2. 세곡 커뮤니티센터 변경도면

3. 수의계약업체관리정보 및 여성기업확인서 각1부.  끝.