문서번호	소방행정과-147
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
신춘수	박충규	김명식	01/06 정재후
협 조
	★담당자		서정훈

북아현119안전센터 신축 사업비 집행 결과보고

서 대 문 소 방 서

(장비회계팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호		□	의사결정 또는 내부검토 과정

북아현119안전센터 사업비 집행 결과보고

우리 소방서에서 추진한『북아현119안전센터 신축(미근119안전센터  재건축)』공사와 관련 예산의 투명성 제고를 위한 예산집행 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

◈  市 소방행정과-1706(’19.1.21.)호 “2019년도 세출예산 운영계획 알림

◈  소방행정과-707(’19.1.18.)호 “2019년 (가칭)북아현119안전센터 신축 사업비 예산 재배정 요청”

◈ 소방행정과-2644(2019.1.2.)호 『(가칭)북아현119안전센터 신축공사 발주 계획』

Ⅱ		추진목적

◈  서대문구 북아현재정비 촉진지구 개발에 따른 신규 소방수요에 대한 능동적 대응 및 소방서비스 수요 충족

◈  대시민 안전사각지대 해소 및 황금시간 목표제 실행을 통한 시민의 생명과

재산보호

◈  미근119안전센터의 노후되고 열악한 근무환경을 개선(신축청사 이전)

Ⅲ		사업개요

◈ 사 업 명: 북아현119안전센터 신축공사(미근119안전센터 재건축)

◈ 위    치: 서울시 서대문구 북아현로 37(북아현동 1016-1)

◈ 사업기간: 2019. 2.13. (착공) ~ 10.18.(준공) *248일

◈ 건축구조: 철근콘크리트조 평스라브지붕 3층, 대지면적 1,672.2㎡ ,

건축면적 539.29㎡, 연면적 898.69㎡

◈ 시공업체: ㈜하나건설이앤씨 등 5개 업체

◈ 감리업체: (주)엠오엠건축사사무소(대표 조성주)

◈ 사업예산: 2,358백만원(공사비2,248백만원, 설계비110백만원)

※ 총사업비: 12,924백만원(기부채납부지 공시지가 10,566백만원 포함)

- 개별공시지가(2019.10.31.기준) : 금6,319,000원

Ⅳ		주요 추진현황

기 간		추진사항	비 고
○ ’06. 08.	:	북아현뉴타운내 공공청사(소방)협의
○ ’12. 09.	:	기부채납 결정고시(시보 제3131호)	9.13자
○ ’16. 11.	:	소방안전 중장기 투자계획 신설사업 반영
○ ’16. 11.	:	소방재난본부 소방안전5개년 투자계획 반영
○ ’17. 05.	:	미근 신축 이전 계획(안) 수립
○ ’17. 07.	:	서울시 투자심사 조건부 적정
○ ’17. 10.	:	서울시 공유재산심의 조건부 적정
○ ’17. 08.	:	행정안전부 중앙투자심사 적정
○ ’17. 11.	:	11월 제1619차 기술타당성심사 적정(조건부)	11.06자
○ ’17. 11.	:	11월 공유재산관리계획 안건 상정 및 의결(적정)	11.21자
○ ’18. 03.	:	신축공사 설계 현상공모
○ ’18. 05.	:	신축 설계용역 계약 체결	05.24자
○ ’18. 12.	:	신축 건축물 설계도서 준공(용역완수)
○ ’19. 01.	:	(가칭)북아현119안전센터 신축공사 발주 계획
○ ’19. 02.	:	(가칭)북아현119안전센터 신축공사 계약체결(건축,토목, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 감리)
○ ’19. 02.	:	신축공사 착공	02.16자
○ ’19. 03.	:	신축 토목공사(절토)계약체결
○ ’19. 04.	:	신축 토목공사(절토)준공
○ ’19. 04.	:	신축 토목공사(절토)준공
○ ’19. 10.	:	신축공사 준공	10.18자
○ ’19. 11.	:	미근119안전센터 이전 및 업무개시	11.01자
○ ’19. 11.	:	북아현119안전센터 개소식	11.22자

Ⅴ		연도별 사업비 배정현황

(단위: 원)

구 분	통계목		계	년도별		비 고
				2018년	2019년
계			*************	***********	*************
북아현119 안전센터 신축 (미근센터 재건축)	사무관리비		**********		**********
	자산취득비		**********		**********
	시설비	설계비	***********	***********
		공사비	*************		*************
	감리비		**********		**********
	시설부대비		*********		*********

※ 기부채납부지 개별공시지가 총액 별도 : ****************

- 산출 : 개별공시지가 ***********(2019.10.31.기준) x 1,672.2㎡

Ⅵ		사업비 집행현황

□ 집행잔액 : 금388,210원                                  (단위: 원)

구 분	사업비 집행잔액				비 고
	배정항목	배정예산	지출금액	집행잔액 (불용반납)
***	*	*************	*************	*******	불용(반납)
2018년도	설계용역비	***********	***********	*******
소 계	1	***********	***********	*******	2018년 반납
2019년도	시 설 비	*************	*************	*****
	자산취득비	**********	**********	******
	시설부대비	*********	*********	******	개소식 행사용품
	감 리 비	**********	**********	*******
	사무관리비	**********	**********	******
소 계	5	*************	*************	*******	2019년 반납

※ 사업비 잔액불용:************************************

Ⅶ		향후 진행사항

❍  건축공사 및 시설물 하자검수 및 보수 조치

❍  청사 생활편익 개선요구 파악 및 조치 등.

붙임 1. 북아현소방청사 예산집행현황(2018~2019년) 1부.

2. 2019.북아현소방청사 예산집행 세부내역 1부.  끝.