문서번호	설비부-137
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	01/06 임정규
협조

『시립마포 실버케어센터 건립 기계설비공사』

가스공사 실정보고 사항 검토보고

2020. 01.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립마포 실버케어센터 건립 기계설비공사』

가스공사 실정보고 사항 검토보고

『시립마포 실버케어센터 기계설비공사』와 관련 건설사업관리단으로부터 가스공사설비 변경사항에 대한 실정보고 사항을 검토 보고드림.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명: 시립마포 실버케어센터 건립 기계설비공사

□ 위    치: 서울특별시 마포구 백범로31길 27(舊, 한국산업인력공단)

□ 규     모: 지하2층/지상4층 12,271㎡(노유자시설, 수용인원 120명)

*******************************************************

************************************************

********************************

□ 계약현황                                            (단위: 원)

구 분	계약금액	공사기간	비 고
***	*************	***********************
***	**********	***********************

2		관련근거

○ 가스공사 실정 검토 수정보고(유탑(마실) 제19-146호, `20.01.02.)

3		검토내용

○ 설계변경 사유

- 가스관(중압관) 비파괴 시험 등 설계도서 누락 및 토목배관(하수관) 간섭 등으로 설계변경

○ 변경 내용

변경 사항	당 초	변 경	사유	추정 증감금액 (천원)
비파괴 시험	**********************	***************** ***************** ********************	***** ******	*********
매몰형 밸브	***********************************	**********************************	****************	********
배관 및 부속품	*************************	************ **************** **************	***********************	********
〈직접비 소계〉				*********
〈제경비 소계〉				********
〈도 급 비〉				*********

지하매설 가스배관 평면도(변경 전)	지하매설 가스배관 계통도(변경 후)

○ 건설사업관리단 검토의견

- 시공업체 실정보고 검토결과 설계누락 부분과 지하매설물 현장여건을 적장하게 반영되었기에 위 내용과 같이 변경 시공함이 타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

○ 건설사업관리기술자의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 실정보고 내용을 승인하고자 하며, 변경 사항은 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임  가스공사 실정보고 1부.  끝.