“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	공원녹지과-320		주무관	조경팀장		공원녹지과장		도시환경국장		부구청장
			강규이	주동희		김현경		안재혁		전결 01/06 하철승
등록일자	2020.1.3.
결재일자	2020.1.6.
공개구분	대시민공개
			협조자
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

강변․대청 오솔길 등 시설녹지 정비계획

2020. 01.

	강 남 구
		공원녹지과

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 「지방자체단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 일원1동, 세곡동 주민에 의한 요청 민원 발생
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 2020년 본예산(구비) 편성
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 지역주민 등 다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ○ ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

강변․대청 오솔길 등 시설녹지 정비계획

우리구 관내 강변오솔길, 대청오솔길, 세곡동 경관녹지의 정비에 대한 주민요청이 지속적으로 발생하고, 나지노출지를 녹화하기 위해 정비사업을 추진하고자 함.

Ⅰ	사 업 개 요

○ 위    치

- 강남구 청담동 107-1번지 외 (강변오솔길)

- 강남구 일원동 711-3번지 (대청오솔길)

- 강남구 세곡동 535, 534 (경관녹지 2,3호)

○ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 11.

○ 사업규모 : 약1,400㎡

○ 소요예산 : 금205,959천원(금이억오백구십오만구천원)

○ 사업내용 : 나지노출구간 관목 및 지피류 식재, 운동기구 및 벤치 등
편의시설 설치, 위험수목 제거 등

○ 대상지 현황

- 강변(청담)오솔길의 2019년 녹화 제외지역에 대한 녹화요청 민원이 지속적으로 발생하여 2개 구간을 녹화하고자 함.

- 대청오솔길 대청아파트 101~104동 앞 부분이 아파트와 인접하여 주민들의 이용이 많으나, 벤치, 운동기구 등 편의시설이 없어 이용불편 민원이 발생하여 편의시설을 설치하고 녹지대를 정비하고자 함.

- 세곡동 경관녹지2,3호는 나지노출지가 많이 발생하여 이를 녹화하고 가로경관을 개선하고자 함.

▲ 강변오솔길 나지노출지	▲ 대청오솔길 현황	▲ 세곡동 경관녹지 나지노출

Ⅱ	추 진 방 법

○ 실시설계용역 시행

- 용역기간 : 착수일로부터 45일

- 계약방법 : 수의계약

※우리구 수의계약시스템을통해 제안접수 후 업체선정

- 용 역 비 : 금12,002,400원(금일천이백만이천사백원)

- 수의계약 사유 : 금액이 소액이고, 조경설계 전문업체와 계약을 체결하여 빠른 시일 내 정비하여 안전사고 예방 및 쾌적한 녹지 환경 제공을 위해 수의계약하고자 함.

○ 공사 시행

- 공사기간 : 2020. 04. ~ 06.

- 계약방법 : 제한경쟁입찰

- 공 사 비 : 금193,956,600원(금일억구천삼백구십오만육천육백원)

- 자격조건 : 「건설산업기본법」에 의한 조경공사업 면허소지업체로서 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

○ 예산과목

- 공원녹지과, 도시개발, 녹지조성및정비, 강변 대청 오솔길 등 시설녹지 정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 위치도 1부.

2. 실시설계 용역산출내역서 1부. 끝.

붙임. 위치도