투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경(총차,3차) 계약의뢰(강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 「강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』 와 관련, 아래와 같이 설계변경 계약의뢰(총차-1회, 3차-1회)하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사

2. 공사금액 : 총차 1,210,356,980원(3차-456,188,220원)

3. 시 공 사 : (주)동우이엘시

4. 공사기간 : ‘12.08.02.~’15.02.28.(3차-‘14.3.1~’15.2.28)

5. 공사금액 변경 현황

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	비 고
총 차	1,210,356,980	1,098,636,000	감 111,720,980
1 차	78,000,000	78,000,000	준공
2 차	676,168,760	676,168,760	준공
향후	456,188,220	344,467,240	감 111,720,980

6. 변경사유 : 운영부서 요구사항, 설계오류·누락 분 반영 및 토목공사 중복 반영분 감 조치

따로붙임 : 1. 설계변경 시행 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	권오식		설비부장	07/03 박기형
협조자	경리과장	최영미		계약1팀장	김점선
시행	설비부-7168	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개